투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	마곡사업부장, 기전사업부장
제목	교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 공사기간 연장승인 통보(강서로, 양천로, 공항로)

1. 귀 사(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 과련근거

가. 교통관리과-17505(2018.07.16.)호

나. 기전사업부-4092(2021.11.22.)호

다. 마곡사업부-4343(2021.11.02.)호

라. 대영전기감GE 21C-11-27(2021.11.17.)호

마. 홍익(도로정비) 제2021-0255(2021.11.02.)호

3. 위 호와 관련한 『교통안전시설물 설치공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이       승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 강서로 교통안전시설물 공사 외 2개 공사

나. 공사장소 : 강서구 강서로, 양천로, 공항로

다. 공사내용 : 신호기 신·이설, 가로등통합 및 안전표지 설치

라. 원 인 자 : 서울주택도시공사

마. 연장사유 : 도로정비공사 공기연장으로 인한 교통안전시설 공사기간 연장

바. 공사기간 연장승인 내용

구 분	승 인 전	승 인 후	비 고
공사기간	2020.08.25. ~ 2021.11.30.	2020.08.25. ~ 2022.06.30.	182일 증

붙임 : 감리사 검토의견서 각 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울주택도시공사 사장,대영유비텍(주) 대표,(주)홍익기술단 대표,서울특별시경찰청장(교통관리과장),서울강서경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장),강서구청장(도로과장)
주무관	이성도		기전과장	전결 11/23 서승완
협조자
시행	기전과-6379	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	대시민공개