문서번호	토목부-21568
결재일자	2021. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김성렬	한병찬	11/24 임춘근

설계용역 준공기한 연기 검토 보고

≪녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 용역≫

2021. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

설계용역 준공기한 연기 검토 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계(1차분)

○ 위    치 : 녹번천(응암역~역촌역)

○ 용역규모 : 연장 750m (여유공간 고려 1.0km), 폭 15m

○ 계약기간 : 2021. 5. 26. ~ 2021. 11. 27.

○ 계약금액 : *********

○ 설 계 사 : ㈜유신 외 3개사

□ 추진경과

○′21. 6.       : 설계용역 착수

○′21. 8.       : 착수보고회 개최

○′21. 8.∼10. : 관계기관 협의 및 측량 등 기초조사

○′21.11.      : 교통량 조사 등 복원 방안 검토 중

□ 검토사항

○ 준공기한 연기

- 당  초 ; ’21. 5. 26. ~ ’21. 11. 27.

- 변  경 : ’21. 5. 26. ~ ’22. 02. 28.

○ 연기 사유 ; 교통처리 계획 등 복개하천 복원의 면밀한 검토를 위해 1차분 과업기간 연장

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 본 과업에 차질이 없도록 1차분 계약기간을 연기코자 함.

붙임  1) 관련 공문 1 부.

2) 합의각서 1부.  끝.