(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

광복교~안양교 도로확장공사

공사개요

· 위    치 :  구로구 개봉동~구로동

· 규    모 : 도로확장 4~5~6차로

· 공사기간 : `16.4.1~`21.12.31

· 도 급 비 : 65,709백만원

· 시공사 : (주)KCC건설

· 감리단 : 동부엔지니어링(주)외2개사

· 설계사 : (주)경동엔지니어링외2개사

실정보고 건명

사토 반출건[광안건 제2021-446호(2021.11.24.)]

실정보고 사유

안양교 종방향점검시설 점검차 설치를 위해 조성한 현장내 잔여토사를 반출하고, 향후 순성토 반입 계획이 없어 설계 반영된 순성토 수량을 정산함.

건설사업관리단

검토의견

안양교 종방향점검시설 점검차 설치를 위해 조성한 작업장 현장내 잔여토사를 반출함은 타당하며, 토석정보시스템을 통한 인근 반출 현장 검토 후 민간사토장을 선정하여 반출하고, 향후 반입계획이 없는 순성토는 정산함이 적정한 것으로 사료됨.

공기에 미치는 영향

(     )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증·감)
규모	순성토 4,110M3 사토(화성시 우정읍) - M3 스마트송장운영비 - M3	순성토 - M3 사토(화성시 우정읍) 1,906M3 스마트송장운영비 1,906M3	순성토 -4,110M3 사토(화성시 우정읍) 1,906M3 스마트송장운영비 1,906M3
금액	53,130천원	62,403천원	증) 9,273천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ● )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

발주처

검토의견

’21.12준공 예정으로 현장 내 잔여 토사를 토석정보시스템에 등록된 인근 현장으로 반출하려 하였으나 토질 부적합의 이유로 민간 사토장으로 반출함은 적정한 것으로 판단되며, 설계 반영된 순성토 수량을 정산하고자하는 책임건설사업관리기술인의 실정보고는 타당하다고 판단됨.

비 고

책임건설사업관리기술인 검토의견서 1부.

결재

주무관

노승환

도시고속도로과장

김동현

토목부장

11/25

임춘근

협조

주무관

남만조