문서번호	정보공개정책과-24323
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기록관리팀장	정보공개정책과장		행정국장
최지현	김성민	김숙희		11/25 김상한
협 조

서울기록문화관 통합전시관리시스템 개발 사업 세부 추진계획

2021. 11.

행   정   국

(정보공개정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울기록문화관 통합전시관리시스템 개발 사업 세부 추진계획

「서울기록문화관 통합전시관리시스템 개발 사업」을 통해 전시공간 내 표출되는 콘텐츠를 사용자가 직접 제어하고, 다양한 주제를 디지털 디스플레이와 연동시켜 구현함으로써 사용자 맞춤형 전시서비스를 제공하고자 함

□ 추진목적

ㅇ 디지털 전시플랫폼 기반의 다양한 전시들을 통합 제어하고 전시콘텐츠를 전반적으로 자동화할 수 있는 관리시스템을 개발하여 업무의 효율성 향상

ㅇ 전시주제를 직접 선택하고 제어하는 사용자 맞춤형 표출기능으로 관람객의 만족도 제고와 탄력적인 전시공간 구축

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 서울기록문화관 통합전시관리시스템 개발 사업

ㅇ 사업기간 : 계약일로부터 30일

ㅇ 주요내용 : 디지털 콘텐츠 연동·교체·제어 등 전시관리에 필요한 통합 시스템 개발

ㅇ 소요예산 : ********(부가세 포함) - 세부내역‘붙임2’참조

□ 사업범위

ㅇ 내용범위 : 통합전시관리시스템 개발 및 사용자 매뉴얼 제시

ㅇ 공간범위 : 서울기록문화관 전시공간(70㎡) 내 디지털콘텐츠 일체

□ 시스템 구성(안)

																															통합전시관리시스템
	서비스/관리자 페이지 개발 언어																										서버 구축																				DB 구축																										서비스 페이지
	PHP, JavaScript, Node.JS, Socket																										Apache HTTP (아파치 웹서버)																				MySQL																										ChromBrowser (크롬 브라우저)
																											PC Admin
																																																																				내부 네트워크 연동 관리자 로그인 (PC– 서버/DB구축시스템)
	인트로-관리자페이지																																			정보관-관리자페이지																																영상관-관리자페이지
							인트로																																			정보관																															영상관
	32인치 모니터 (1대) 공간소개 인트로 영상																																주제 선택용 키오스크 (1대) 주제별 포스터 및 설명 업로드																																주제 선택용 키오스크 (1대) 주제별 포스터 및 설명 업로드
	소개 키오스크 (2대) 국·영문 별도 세부설명																																기록 사진 모니터 (5대) 주제별 사진 및 자막 업로드																																프로젝터 (1대) 주제별 영상 업로드
	디지털 모니터 (5대) 자치구 시청각 자료 업로드																																75인치 모니터 (1대) 주제별 영상 업로드
																																	46인치 모니터 (3대) 주제별 사진 및 영상 업로드
																																	프로젝터 (1대) 주제별 사진 및 영상 업로드

□ 세부 추진내용

❶ 콘텐츠 연동 및 통합제어가 가능한 사용자별(관람객-관리자) 시스템 개발

- (관람객) 사용자가 선택한 전시주제로 디스플레이와 연동되어 표출

- (관리자) 콘텐츠 추가 및 교체 등 전시 디스플레이에 대한 통합제어

❷ 기본 메타데이터(개체 속성에 대해 설명하는 데이터) 생성 및 프레임 개발

- 전시콘텐츠별 수집된 사진·영상 기록물의 메타데이터 생성

- 신규 데이터(기록콘텐츠) 추가 및 누적관리에 용이하도록 프레임 개발

․ 전시주제, 전시형태, 전시물 종류에 따른 디스플레이 연출 프레임 개발

․ 신규 데이터 추가 및 누적관리에 대한 매뉴얼 작성 및 전시 서비스 방안 제시

❸ UI/UX 기획 및 디자인·개발, 응용SW 개발

- 사용자의 요구사항과 하드웨어 특성을 고려하여 관람시민과 전시서비스 간 원활한 상호작용을 할 수 있도록 UI(User Interface; 시각적 상호작용)와 UX(User Experience: 사용자 경험기반 만족요소) 기획 및 응용SW 개발

❹ 콘트롤 룸 조성 및 현장 설치

- 전시 공간별 제어가 가능하고 통합하여 관리 가능한 콘트롤 룸을 조성하고 통합전시관리시스템을 운영할 수 있도록 현장 설치 및 테스트

콘트롤 룸 위치도

□ 추진방법

ㅇ 추진방법 : 수의계약

- 근거규정 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제5호 마목, 「여성기업지원에 관한 법률」제2조 제1호

- 선정기준 :  견적가격이 타 업체 대비 저렴하고, 다수의 전시관 조성 및 운영 관련 사업에 참여한 본 과업에 대한 전문성*이 인정되는 업체

*「정보시스템개발서비스」부문 또는「정보시스템유지관리서비스」부문 중소벤처기업부 직접생산확인 업체

ㅇ 소요예산 : ********(부가세 포함) - 세부내역‘붙임2’참조

- 예산과목 : 정보관리강화, 기록물시설관리, 기록정보관리, 전산개발비(207-02)

□ 향후일정

ㅇ 사업계획 수립 및 계약의뢰              : ‘21. 11. 넷째주

ㅇ 사업추진                               : ‘21. 11. ~ 12.

- 요구분석 및 데이터 설계                   :    ~‘21. 11. 30.

- 화면 디자인 및 메뉴 구성                   :    ~‘21. 12. 11.

- UI/UX, DB 개발, 응용SW개발              :    ~‘21. 12. 18.

- 현장 설치 및 테스트                        :    ~‘21. 12. 23.

ㅇ 사업완료(준공)                          : ‘21. 12. 넷째주

붙임 1. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부.

3. 서울기록문화관 내 전시공간 개선(안) 1부.  끝.