투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독1처
제목	공사 실정보고(콘크리트깨기 수량 변경 등)에 대한 회신

1. 공사감독1처-8563(2021.11.23)호와 관련입니다.

2. 목동교 보수공사 현장실정보고(콘크리트깨기 수량 변경, 강재브라켓 부위 표면보수) 건에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 준공기한내 공사가 완료 될 수 있도록 공정관리 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

▣ 실정보고 검토결과 : 승인

가. 실정보고 사항은 실제 시공수량을 반영하여 설계변경시 정산조치.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	강연홍		시설보수과장	전결 11/25 代주영진
협조자
시행	시설보수과-4741	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7975	/전송	2657-7970	/		/	대시민공개