문서번호	도시철도토목부-12989
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
박성훈		허동	11/25 최병훈
협조	주무관		노권호
	주무관		엄상민

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

휴일 작업계획 검토 보고 (2021년12월)

2021. 11.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

휴일 작업계획 검토 보고 (2021년12월)

「진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구 건설공사」와 관련하여 ’21년 12월 휴일 작업계획 승인 요청에 대하여 검토 보고함. ※ 동명감 진접1 제2021-402(2021.11.24.)호

1		관련 근거

❍ 공사계약 특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)

❍ 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급

2		휴일 작업계획

❍ 세부내용

일자	작업위치	작 업 내 용	관리자
			감리단	시공사
12.4 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 굴착	******	****** ****** ****** ****** ****** ******
	- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 시점부 하부굴착 복선터널 종점부 굴착
	- 인입선 종점부	인입선 종점부 암판정 준비 길내기 토공 정리 갱구부 배면 패널식 옹벽 2단 시공
12.11 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 굴착	******	****** ****** ****** ****** ****** ******
	- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 시점부 하부굴착 복선터널 종점부 굴착
	- 인입선 종점부	갱구부 배면 패널식 옹벽 1단 사면 본발파 천공 B(함)금곡제2 되메우기 및 뒷채움 블록식 보강토 옹벽 기초 시공
12.18 (토)	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 굴착	*******	****** ****** ****** ****** ******
	- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 시점부 바닥 잔버력 처리 복선터널 종점부 굴착 경사갱(우회갱) 굴착
	- 인입선 종점부	B(함)금곡제1, 2 되메우기 및 뒷채움

❍ 작업 사유: 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

- 휴무일(토요일) 작업에 대해 대체 휴무 실시, 휴일(공휴일) 작업에 대한 추가 비용은 시공사 부담

3		건설사업관리단 검토의견

❍ 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일작업 시행이 필요함에 따라 관련규정『서울특별시 공사계약 특수조건 11조(휴일 및 야간작업)』에 의거 귀책사유가 시공사에 있어 건설사업관리대가는 시공사 부담이 타당함.

❍ 또한 시공사에서 요청한 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생하지 않도록 평일과 동일하게 건설사업관리업무를 수행함이 적정하다고 판단됨.

	참 고 자 료
※ 과업내용서6.3.2.(1) 휴일 및 야간근무 - 원인제공자(귀책사유)가 명백한 경우는 원인제공자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. ※ 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고【도시철도토목부-10681(’13.11.14.)】 - 휴일근무 감리대가: 귀책사유에 따라 지급 ▸ 발주처 귀책: 감리원이 휴일에 근무하고 평일 대체 휴무 ▸ 시공사 귀책: 시공사에서 감리원 휴일 근무 대가 지급

4		조치 계획

❍ 상기 건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단됨에 따라 아래와 같은 조건으로 ‘21년 12월 휴일 작업계획에 대해 승인하고, 작업내용 등 변경사항 발생 시 사전 보고 후 시행토록 조치하고자 함.

	승 인 조 건
- 휴(무)일 작업에 따른 건설사업관리비는 시공사 부담 - 작업 시 시공사 현장 책임자는 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시 안전관리자를 포함하여 근무하도록 하여 안전사고예방 관리 철저 - 근로자 보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대 항목을 준수하고 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고 - 작업 시 신호수 배치, 통행로 확보를 철저히 하여 시민 불편사항을 최소화 - 화재예방을 위해 지정장소외 흡연금지, 위험물 보관소 및 가스용기 관리 철저 - 건설기계 · 장비 또는 중량물 취급 작업시 건설사업관리기술자 확인 및 안전수칙 준수 철저 - 폭설 및 재난 대비 관련 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리 철저 동절기 대비 근로자 안전대책 이행 철저 - 코로나 19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침 시행 철저

붙 임   관련 공문 1부.  끝.