문서번호	설비부-16928
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
지상범	장재순	11/25 김호성

『내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사』

장기1차 설계변경(2회) 검토 보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『내부순환로(월곡IC) 구조개선전기공사』

장기1차 설계변경(2회) 검토 보고

우리 부에서 시행중인『내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사(장기1차)』와 관련, 책임건설사업관리단의 설계변경 요청에 대하여 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1		공사개요

❍ 사 업 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사(장기1차)

❍ 공사위치 : 성북구 하월곡동 37번지 일대(월곡역 주변)

❍ 공사기간 : 2016.04 ~ 2022.09.

❍ 도 급 비 : 1.6억원(전기)/총사업비 158억

❍ 감 리 단 : ㈜유신

❍ 시 공 사 : ㈜케이엔앰전력

2		검토내용

관련근거

❍ 『전기공사(장기1차) 정산 변경 준공 설계서 계약요청

[건설사업-21-1160호(`21.11.24.)]

설계변경 사유

❍ *********************************************

❍ ***************************

❍ ************

주요공종 변경 내역                                               [단위:  천원]

구 분	변 경 내 용	공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증·감
직접공사비	가로등설비 공사	*****	*****	*******	*****************
	2. 신호등설비공사	*****	*	*******	********************
간접공사비	제경비 등	*****	*****	*******
합 계		******	******	*******

설계변경 금액                                            [단위: 천원]

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
****	******	******	*******	**

3		감리단 검토의견

❍ 준공 정산 설계서를 검토한결과 토목1차 공사 준공(2021.12.31.)공종 및 현장 작업 여건에 맞추어 금년 예산소화 가능 금액으로 물량 및 금액을 조정하는 것이 적정하다고 판단됨.

4		보고자 조치의견

❍ 본 공사 건설사업관리단의 검토의견 검토한 결과, 설계변경 내역이 적정한 것으로 판단됨,

❍ 계약부서에 계약변경 의뢰하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 책임건설사업단 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.