문서번호	방재시설부-14987
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		김태중	11/25 박홍봉
협 조
	주무관			김소연

「신상도 지하차도 확장공사」

준공기한 연기 검토보고

2021.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사」

준공기한 연기 검토보고

「신상도 지하차도 확장공사」와 관련하여 총차 및 9차 준공기한 연기  (`21.12.→`22.4.)에 대하여 검토 보고드림.

※ 관련문서 : 신상도감 2021-449호(2021.11.25.)

Ⅰ		공사 개요

❍ 위    치 : 동작구 상도동 159-21~207-5

❍ 규    모 : 도로 확장 2차로 → 4～6차로, 연장 324m

(지하차도 확장 2차로 → 4차로, 연장 221m)

❍ 공사기간 : `07.12.31.~`21.12.31.(9차 `21.8.25.~`21.12.31.)

❍ 도 급 비 : 18,929,900천원(9차 7,520,621천원)

❍ 시 공 사 : (유)한백종합건설 외 1개사

❍ 건설사업관리단 : 극동엔지니어링(주) 외 2개사

Ⅱ		추진 경위

❍ `07.12. : 공사 계약 및 착공

❍ `17. 1. : 공사 중지(대광·청학빌라 추가 보상절차 이행)

❍ `18.10. : 수용재결금 공탁 및 토지·건물 등기 이전 완료

❍ `19.12. : 지장가옥 주민(총 10세대) 이주 완료 및 공사 재개

❍ `20.10. : 지하차도 양측 우회도로 개통

❍ `21. 2. : 지하차도 상부 횡단도로 개통

❍ `21. 5. : 지하차도 BOX 내부 암굴착 완료

❍ `21.11. : 지하차도 구조물 및 부대공사

Ⅲ		보고 내용

▢ 준공기한 연기 검토

❍ 준공기한 연기사유

- 자재수급 지연기간 및 코로나19 예방 관련 작업 중지기간 반영

- 시설물 유지관리기관(동작구) 요구사항 반영으로 추가 공사기간 필요

- 동절기가 도래함에 따라 포장, 도색, 수목 식재 등 품질 확보 어려움

❍ 공사 소요일수 검토

연번	구 분	소요일수(일)	관련문서
1	원자재 및 철근 품귀에 따른 자재수급 지연	60	신상도감 2021-343호 (2021.6.9.)
2	코로나19 검사·판정으로 인한 작업 일시중지	7	신상도감 2021-374호 (2021.7.29.)
3	레미콘 운송업체 파업에 따른 자재수급 지연	2	신상도감 2021-406호 (2021.9.24.)
4	지하차도 상부도로 열선 설치	33	동작구 도로관리과-17618호 (2021.11.2.)
5	시·종점부 도로 포장 정비(절삭 및 덧씌우기)	4
6	휴일(일요일 및 공휴일) 작업 시행	-16	신상도감 2021-390호 (2021.8.30.) 등
7	지하차도 BOX 중앙벽체부 강재기둥 설치(변경)	-30	신상도감 2021-376호 (2021.8.6.)
	합 계	60 (2개월)

❍ 준공기한 연기내용

구분	당 초	변 경	증 · 감
총차	`07.12.31. ~ `21.12.31.	`07.12.31. ~ `22.4.30.	증 4개월 ※ 동절기 2개월 포함 (`22.1.~`22.2.)
9차	`21.8.25.~ `21.12.31.	`21.8.25. ~ `22.4.30.

Ⅳ		책임건설사업관리기술자 의견

❍  전국적인 철근 파동, 레미콘 파업으로 인하여 관급자재의 수급이 지연되고 코로나19 검사·판정을 위하여 작업을 일시중지하는 등 불가피한 공기 지연사유가 발생하였으며,

❍  상부도로 열선 설치 등 시설물 유지관리기관(동작구) 요구사항을 반영하고 동절기가 도래하여 포장, 도색, 조경공사의 품질 확보가 어려운 점을 감안하여 `22.4월까지 공기 연장함이 타당함.

Ⅴ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되는 바, 준공기한을 연기하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  감리단 검토의견서 1부.  끝.