문서번호	물재생시설과-12226
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기획팀장	물재생시설과장
김창수		조장환	11/25 윤창진
협 조

「물재생센터 수처리기능 강화 및 시설용량 재산정 용역」

준공기한 연장 검토보고

물순환안전국

(물재생시설과)

「물재생센터 수처리기능 강화 및 시설용량 재산정 용역」

준공기한 연장 검토보고

「물재생센터 수처리기능 강화 및 시설용량 재산정 용역」수행사로 부터 과업기간 연장요청이 있어 검토보고함

□ 사업개요

❍ 용 역 명 : 물재생센터 수처리기능 강화 및 시설용량 재산정 용역

**************************************

************************************************

*************************

❍ 용역 주요내용

- 장래 수질기준 강화 및 시민 요구수준을 감안한 수질관리 목표 설정

- 미래 환경수요 증가에 따른 적정 시설용량 재산정 등

□ 추진경과

❍ ’19.12. : 물재생센터 비젼 3.0 추진계획(시장방침)

❍ ’20. 7. : 「물재생센터 수처리기능 강화 및 시설용량 재산정용역」착수

❍ ’20. 8. : 착수보고

❍ ’21. 4. : 중간보고 및 자문회의

□ 계약기간 변경

❍ 계약 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	*********	*********	****
계약기간	*********************	*********************

❍ 계약기간 변경사유

********************************************************************************************

*************************************************

❍ 지체상금 : 미부과

□ 조치계획

❍ 계약기간 연기에 따른 계약변경 의뢰(재무과)

붙임 1. 계약기간 변경 요청서. 1부

2. 합의각서 1부  . 끝.