투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기 의뢰 (탄천변 동측도로 확장공사 실시설계용역)

1. 토목부-21703(2021.11.25.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 진행 중인 「탄천변 동측도로 확장공사 실시설계 용역」에 대해 다음과 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 탄천변 동측도로 확장공사 실시설계 용역

- 용역규모 : 도로 구조개선 연장 4.9㎞, 왕복 4 ~ 6차로

- 계약기간 : ’08.12.31. ~ ’21.12.31.(총차)/’18.3.13. ~ ’21.12.31.(5차)

- 계약금액

· 총차	: 금 4,613,372,000원(금 사십육억일천삼백삼십칠만이천원)

· 5차 : 금 1,441,000,000원(금 일십사억사천일백만원)

- 설 계 사 : ㈜동일기술공사 외1

나. 준공기한 연기

구분	당초 계약기간	변경 계약기간	증/감
총차	’08.12.31. ~ ’21.12.31.	’08.12.31. ~ ’22.5.31.	증) 150일
5차	’18.3.13. ~ ’21.12.31.	’18.3.13. ~ ’22.5.31.	증) 150일

※ 계약금액 변동 없음

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	홍현기		토목설계과장	한병찬		토목부장	11/25 임춘근
협조자
시행	토목부-21796	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2586	/전송	768-8905	/	hkhong80@seoul.go.kr	/	부분공개(6)