“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결[마천로 장기사용 송배수관 정비공사]

1. 급수운영과-19098(2021. 11. 25.)호와 관련입니다.

2. 「마천로 장기사용 송배수관 정비공사」건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하고자 합니다.

가. 건           명 : 마천로 장기사용 송배수관 정비공사

*****************************

다. 공 사 기 간 : 2021.  7. 1. ~ 2021. 11.  27.

라. 변 경 사 유 : 물량 증·감, 신규공종 발생 및 제경비(4대보험료 등) 정산 등

마. 변경 계약내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
******	************	***********	************

바. 계 약 보 증 금 : 해당없음

사. 도시철도채권 : 해당없음

아. 인  지  세 : 해당없음

자. 후 속 조 치 : 변경계약 체결 후 발주부서 통보

붙임 : 설계변경 계약의뢰 공문 및 관련서류 각 1부.  끝.

주무관	류상호		행정관리팀장	代이진이		행정지원과장	김인웅		강동수도사업소장	11/25 김명용
협조자
시행	행정지원과-17334	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-5016	/전송	02-3146-5078	/	tkdgh5856@seoul.go.kr	/	부분공개(6)