“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	활성탄흡착지 회수관 설치공사 설계변경(최종) 계약의뢰

1. 우리센터에서 시행중인 『활성탄흡착지 회수관 설치공사』건에 대하여 아래와 같이        설계변경 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 활성탄흡착지 회수관 설치공사

나. 공사개요 : 회수관 설치(D400mm) L=46m 등

다. 공사기간 : 2021. 9. 23. ~ 11. 30

라. 도 급 자 : ㈜ 광화건설  대표자  차세훈

마. 설계변경(최종)                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	54,086,200	53,988,000	△98,200
공급가액	49,169,273	49,080,000	△89,273
부 가 세	4,916,927	4,908,000	△8,927

바. 설계변경 사유 : 공종 간 계약 물량 변경 및 보험료 정산 등

사. 예산과목 : 정수센터 시설정비(시설비),활성탄지 역세척회수배관 증설(추경)

붙임  1. 활성탄흡착지 회수관설치공사 설계변경(최종) 1부.

2. 설계변경 심의위원회 심의결과 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 변경 합의서 및 고용산재보험료 납부확인서 각 1부.

5. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.

	정수시설과장
주무관	김영후		정수시설과장	11/25 유통희
협조자	주무관	장현순
시행	정수시설과-6462	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)3146-5577	/전송	02)3146-5508	/	kyhoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)