문서번호	기전과-6521
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
오태환		11/25 서승완
협조

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차) 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  11.

강서도로사업소

[기  전  과]

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)

설계변경 검토 보고

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)와 관련하여 감리업체가 제출한 설계변경서에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함.

□ 관련근거

○ 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차) 설계변경 요청

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-11-32호(2021.11.25.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)

○ 공사위치 : 강서구 화곡시장 앞

○ 공사내용

- 화곡본동시장 앞(20년 규제 28518) : 신호기(차) 신설

- 화곡시장 앞(21년 규제 8867) : 신호기(3->4색등)개선

○ 계약금액 : 11,870,000원

○ 공사기간 : 2021. 8. 27. ~ 2021. 12. 06.

○ 계약업체 : 연희에스엔(주) 대표 박노영

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경 및 실제 시공물량 정산

- 보험료 등 제경비 정산

○ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액
LSU	설치물량 감소(1->0)	감) 521천원
신호케이블	가공 2선 설치물량 증가(18->29) 가공 4선 설치물량 감소(12->0)
제경비	간접노무비 및 보험료 등	감) 943천원
합 계		감) 1,464천원

※ 상세 내용 및 내역 붙임문서(설계변경) 참조

□ 설계변경금액(총괄)

구 분	당 초	변 경	증 감 액
도 급 비	11,870,000원	10,406,000원	감)1,464,000원

□ 조치의견

○ 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 실제 시공물량 정산, 제경비 정산 등 수정 내용을 반영한 감리업체 설계변경 내용이 적정하여 이를 승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임  2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차) 설계변경 요청 1부.  끝..