코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(서울시 하수도 사업관리 용역)

1. 물재생계획과-14982(2021.11.24.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행 중인「서울시 하수도 사업관리 용역(장기계속)」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울시 하수도 사업관리 용역(장기계속 2차)

나. 도 급 자 : ㈜이산 외 2개사

다. 준공기한 연기내역

- (당초) 2021.05.01.~2021.12.31.

- (변경) 2021.05.01.~2022.04.30.

※ 총차분 용역기간 및 용역비 변경사항 없음.

라. 지체상금 부과여부 : 미 부과

붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	물재생계획과장
주무관	박영호		하수관리팀장	정한영		물재생계획과장	11/25 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-15028	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	2009029199@seoul.go.kr	/	대시민공개