문서번호	지식문화과-9147
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	지식문화과장	서울도서관장
배성호	차영선	11/25 이정수
협 조

서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사 감리용역 시행계획

2021. 11.

서울도서관

(지식문화과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

서울아트책보고(제2책보고) 리모델링공사 감리용역 시행계획

서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사 감리용역을 아래와 같이 수립하여 시행하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 서울아트책보고 조성 리모델링 공사 (건축, 기계, 전기, 통신, 소방)

○ 위    치 : 구로구 경인로 430(고척스카이돔)

○ 규모 및 용도

- 지하2층~지상4층 연면적 83,623.43㎡ 中

지하1층 2,656.49㎡ / 판매시설

○ 공사종별 : 기존 시설 지하1층 리모델링

○ 공사기간 : 착공일 ~ ’22.04.30.

○ 총 공사비 : 2,076백만원(도급비 1,775백만원, 관급비 300백만원)

배치도	조감도

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’20.06.23. : (가칭)제2책보고 건립을 위한 사전조사 용역 계획 수립

○ ’20.07.27. : 후보지로 고척스카이돔 지하공간 입지 검토 건의

○ ’20.08.18. : 책 문화시설 관련 전문가 현장방문 및 자문(6명)

- 책구장 건립으로 경기장과 문화공간의 상생의 장 조성

- 문화시설이 부족한 서남권에 복합문화공간의 입지로 적정

○ ’20.09.28. : 제2책보고 조성 기본계획 수립(문화본부 방침, ’20.08.28.)

○ ’20.11.17. : 기본구상 및 기본설계 용역

○ ’21.03.29. : (가칭)서울아트책보고 운영계획 수립(부시장 방침 제72호, ’21.3.29.)

○ ’21.06.11. : 실시설계 용역

○ ’21.06.29. : 민간위탁 추진계획 수립(문화본부 방침, ’21.06.29.)

○ ’21.09.08. : 실시설계 완료

○ ’21.10.05. : 계약심사 사전검토 의뢰(계약심사과)

○ ’21.10.21. : 계약심사 완료(계약심사과)

○ ’21.11.08. : 공사시행 계획수립 및 계약의뢰(재무과)

Ⅲ		감리용역 발주계획

□  건축 감리 용역개요

○ 용역명 : 서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사 건축 감리용역

○ 용역기간 : 착수일 ~ ’22.05.31.

○ 용 역 비 : 15,609천원(예정)

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위 및 대가기준에 따라 산정(국토교통부 고시 제2020-635호), 기술용역 타당성심사 시 조정될 수 있음

○ 과업내용 : 서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사 건축, 기계분야 공사감리(세부내용 붙임□과업지시서□참조)

○ 계약방법 : 수의계약

・ 근 거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목(여성기업)

・ 수의계약사유 : 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 용역계약으로 여성기업을 대상으로 수의계약을 체결하여 조속히 사업을 추진하고자 함

○ 업체자격 : 건축사법 제7조의 규정에 의한 건축사 면허를 소지하고 동법제23조의 규정에 의한 건축사사무소등록 신고를 필한 업체

○ 예산과목 : 도서관 및 독서문화진흥, (균형발전특별회계)도서관건립조성, 제2책보고조성, 시설비및부대비, 감리비

□ 설비(전기, 통신, 소방) 감리용역 개요

○ 용역명 : 서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사 설비 감리용역

(전기,소방, 통신)

○ 용역기간 : 착수일 ~ ’22.05.31.

○ 용 역 비 : 35,424천원(예정)

(전기 : 15,422천원, 통신 : 10,205천원, 소방 : 9,797천원)

※ 기술용역 타당성심사 시 조정될 수 있음

○ 과업내용 : 서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사 설비(전기, 통신, 소방)분야 공사감리(세부내용 붙임□과업지시서□참조)

○ 계약방법 : 수의계약

・ 근 거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목(전기, 통신, 소방 별도 계약 시), 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목(여성기업, 자격을 모두 갖춘 업체와 통합 계약 시)

・ 수의계약사유 : 추정가격이 2천만원 이하인 용역계약으로 수의계약을 체결하여 조속히 사업을 추진하고자 함(전기, 통신, 소방 별도 계약 시), 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 용역계약으로 여성기업을 대상으로 수의계약을 체결하여 조속히 사업을 추진하고자 함(자격을 모두 갖춘 업체와 통합 계약 시)

○ 업체자격

・ 전력기술관리법 제14조 및 같은법 시행령 제27조 규정에 의한 종합감리업 또는 전문감리업을 등록한 업체

・ 정보통신공사업법 제2조 및 제8조의 규정에 의한 용역사업자로서 정보통신 관련 분야의 자격을 보유하고 있는 업체

・ 소방시설공사업 제4조 및 같은법 시행령 제2조 규정에 의한 전문소방공사 감리업을 등록한 업체

○ 예산과목 : 도서관 및 독서문화진흥, (균형발전특별회계)도서관건립조성, 제2책보고조성, 시설비및부대비, 감리비

Ⅳ		향 후 계 획

○ ’21. 11월 4주차 ~ 12월 1주차 : 기술용역 타당성 심사 요청

○ ’21. 12월 1주차                : 감리용역 계약 및 착수

○ ’22. 05월말                     : 감리용역 준공

붙 임  1. 과업내용서(건축, 설비) 각 1부.

2. 산출내역서(건축, 설비) 각 1부.  끝.