투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행에 따른 변경계약 의뢰[한강 준설(저수로) 정비공사]

우리 부서에서 추진중인 『한강 준설(저수로) 정비공사』에 대하여 아래와 같이   설계변경(1회)을 시행하고 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 한강 준설(저수로) 정비공사

2. 공사기간 : 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 31.

3. 계약금액 : 1,341,609,000원

4. 계 약 자 : 관악산업㈜ 대표 이규항

5. 설계변경 사유

- 여의도 물빛무대 주변 준설 물량 반영

- 수상택시 승강장(당산,잠실) 수상운반거리 조정(실제 운반거리 반영)

6. 설계변경 내용

(단위: 원)

구 분	2회 설계변경			비 고
	당초	변경	증·감
도급비	1,341,609,000	1,499,660,000	증 158,051,000

7. 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원관리 및 운영, 한강하천시설물관리, 한강  저수로정비, 시설비(시비)

붙임  1. 설계변경(1회) 시행 보고서 1부

2. 설계변경(1회) 내역서 1부

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	시설부장
★주무관	전조연		치수과장	최연호		시설부장	11/25 박상보
협조자	주무관	조승만
시행	치수과-7419	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 성수동1가 642-25	/
전화	3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	부분공개(5)