문서번호	시설과-4750
결재일자	2021. 11. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김석광	권종화	11/26 김인숙
협 조
	공원운영과장		이인수

청사 승강기 설치 전기공사 추진계획

2021.  11.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

청사 승강기 설치 전기공사 추진계획

장애 민원인 청사 방문 시 불편함을 최소화하기 위한「청사 승강기 설치」와 관련하여 해당 전기공사를 시행하여 방문 보행약자들의 편의증진에 기여하고자 함

Ⅰ		관련근거

□「청사 승강기 설치 계획」, 공원운영과-7573호(2021. 5. 13.)

□「청사 승강기 설치」관련 TF팀 구성 운영계획, 공원운영과-7849호(2021. 5. 20.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 청사 승강기 설치 전기공사

□ 공사개요

◦ 승강기 전원 공급 및 분전반 설치

◦ 층별 승강기 입구 조명 설치

◦ CCTV 및 소방시설 선로 포설

※ CCTV 및 소방시설 설치, 이상유무 확인은 우리 사업소 유지관리 업체에서 시행

□ 공사기간 : 착공일로부터 25일

***********************************************

**********************************************************

***************************************************

***********************************************

******************

****************************************************

******************************************

***********************************

****************************************

□ 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 1년간

◦ 전기공사업법 시행령 제11조의2의 별표3의2(전기공사의 종류별 하자담보

책임기간)에 따름

□ 예정공정표

기 간(일) 공 정		공 사 기 간 (25일)												비 고
		5일			10일			20일			25일
		2	3	5	7	9	10	13	15	20	22	23	25
1.	현장파악 및 자재준비
2.	배관공사
3.	전원 배선 포설
4.	CCTV, 소방 선로포설
											L
5.	층별 승강기 입구 조명 설치
6.	전원 인입
7.	시운전 및 완료
8.	현장정리 및 정돈

Ⅲ		기대효과

□ 청사 승강기 설치에 따른 안전한 전기시설의 설치로 승강기 운영에 불편

함이 없도록 조치하여 청사 방문 보행약자들의 편의 증진에 기여

붙임 1.「청사 승강기 설치 계획」, 공원운영과-7573호(2021. 5. 13.)

2.「청사 승강기 설치」관련 TF팀 구성 운영계획, 공원운영과-7849호

(21. 5.20.).

3. 설계내역서(표준품셈기준) 1부.

4. 산출기초조사서 1부.  끝.