문서번호	기전과-8295
결재일자	2021. 11. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
강혜지		11/26 代문준호
협조

『동호대교남단 램프 자동염수살포장치 전기공사』

설계변경 검토보고

2021. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

『동호대교남단 램프 자동염수살포장치 전기공사』

설계변경 검토보고

『동호대교남단 램프 자동염수살포장치 전기공사』시행 중 현장여건에 따른 설계변경 사유가 발생하여 검토하여 보고 드림

▢ 관련근거

○ 자동염수살포장치 설치에 따른 전기공사 기간연장 요청

(도로보수과-8478, 2021.11.26.)

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 동호대교남단 램프 자동염수살포장치 전기공사

○ 계약금액 : ***********************

○ 공사기간 : 2021. 11. 3. ~ 2021. 12. 2.

○ 계약업체 : *********************

○ 공사내용 : 케이블, 배관 설치 및 기타 부대공사

▢ 설계변경 내역

○ 설계변경 내용 : 공사기간 변경

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	2021. 11. 3. ~ 2021. 12. 2.	2021. 11. 3. ~ 2021. 12. 17.

○ 설계변경 사유 : 토목공정 지연에 따른 절대공기 부족

▢ 검토의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함

붙임  합의각서 1부.  끝.