문서번호	치수과-20295
결재일자	2021.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제448호

주무관		하수계획팀장		치수과장	안전건설교통국장		부구청장
김형대		김경원		민병기	최연우		11/29 유보화
협조

★ ◉

『전농천 악취저감 및 주민친화공간 조성공사』

관급자재(레미콘) 납품 불안정에 따른 조치계획

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [√] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ]] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( 하천관리과 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『전농천 악취저감 및 주민친화공간 조성공사』

관급자재(레미콘) 납품 불안정에 따른 조치계획

우리 구에서 시행중인「전농천 악취저감 및 주민친화공간 조성공사」의 관급자재(레미콘) 납품 불안정에 따른 조치계획 보고 임

Ⅰ		공사개요

위    치: 성동구 용답동 182번지 일대(전농천)

규    모: 연장 600m, 폭 35~42m(전농천 복개 일부 및 반복개 구간)

- 1차: 제방도로 정비(주차면 확대 28면) 및 보도데크 설치 등

- 2차: 초기우수처리관로 신설 2@▣4.3m×1.8m, L=420m

- 3차: 주민친화공간(체육시설 등) 및 악취차단벽 설치

기    간: 2021. 2.26. ~ 2022. 5.31.

공 사 비: 총9,000백만 원(시비: ’21년 4,592 / ’22년 4,408)

시 공 사: 신안건설산업(주) 대표 우정현

건설사업관리용역사: 극동엔지니어링(주) 대표 성낙일 외 1개사

Ⅱ		현황 및 문제점

관급자재(레미콘) 납품 불안정으로 공기 지연

※ 레미콘 원자재 시멘트 공급 불안정 및 요소수 품귀 현상에 따른 화물연대 파업 등

현재 조달청 단가계약으로 성동구에 납품 가능한 업체는 ㈜삼표, 흥국산업, 유진기업(주) 3개 업체이며, ㈜삼표, 흥국산업은 12월30일까지 만 납품가능함

또한 초기 우수처리관로 신설 시 관급자재(레미콘)이 바닥슬라브 200㎥/일, 벽체 및 상부 슬라브 250㎥/일 필요하나, 흥국산업은 100㎥/일 납품이 가능하며, ㈜삼표 및 유진기업(주)은 납품이 지연되고 있어 공사 추진에 어려움이 있음

※ 현재 초기 우수처리관로 신설 No3.구간의 철근 조립 및 거푸집 제작은 11.19. 완료하였으나, 관급자재(레미콘) 공급에 어려움이 있어 공사가 지연되고 있는 실정임

대상 진행 완료 No.1 No.11 방류수로 No.4 No.6 No.7 No.3 No.5 No.8 No.9 No.10 No.2
위 치 도	No.3 구간 콘크리트 타설 대기 중(11.19)

Ⅲ		조치계획

공기 지연이 최소화 되도록 동 공사에 필요한 레미콘 자재를 관급과 사급을 병행 사용코자하며, 사급 사용량에 맞춰 추후 설계 변경 시 정산코자 함

※ 원자재(시멘트) 공급 불안정으로 사급 또한 원활하지 않음

관급자재(레미콘) 납품 불안정에 따른 초기우수처리관로 설치가 지연되어 상부에 설치되는 체육시설, 산책로 등 설치에 필요한 절대공기가 부족하여 공사 기한을 연기코자 함

- 공사기한(총차): 당초 2022. 5.31. → 변경 2022. 6.30.

붙임: 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.