문서번호	기전과-6625
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
오태환		11/29 서승완
협조

2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

강서도로사업소

[기 전 과]

2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고

2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사와 관련하여 책임감리가 제출한 실정보고에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사 실정보고 검토결과서 제출

- 문서번호 ㈜트래픽스 TR-어보21-1131(21. 11. 29.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 영등포구 윤중초(t-gis : 광장아파트), 당서초 후문

- 윤중초(t-gis : 광장아파트) : 보행신호등 설치

- 당서초 후문(20년 규제 10238) : 차량주 이설

- 당서초 후문(21년 규제 9100) : 보행자작동신호기 철거

잔여시간표시기 설치

○ 계약금액 : 44,184,000원

○ 공사기간 : 2021. 07. 19. ∼ 2021. 12. 15.

○ 계약업체 : ㈜석현이엔씨 대표 국석호

○ 감리업체 : ㈜트래픽스 대표 김희수

□ 실정보고 내용

○ 도급비 세부내역 : 증 736천원

- 윤중초(t-gis : 광장아파트) : 공사원가 증 752천원

· LSU 사급에서 관급으로 변경 및 물량 증가

· 현장조사결과 기존배관 선통 불가로 가공주 물량 추가 및 케이블 물량 변경

· 설계오류로 인한 전원선 철거 물량 변경

- 간접비(간접노무비 및 제경비) : 감 16천원

□ 조치의견

○ 책임감리 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에       따라 작업 시행토록 지시하고 추후 작업완료 보고 시에 정산

붙임  2021년 어린이보호구역 교통신호기 공사 실정보고 1부.  끝.