투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(사각사각플레이스 야외 조명 보수 공사)

1. 한강관광사업과-5446(2021.11.30.)호와 관련입니다.

2. 「사각사각플레이스 야외 조명 보수 공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 사각사각플레이스 야외 조명 보수 공사

나. 계약업체 : *********

다. 계약금액 : **********************

라. 준공기한 변경내용

- 당    초: 2021. 11. 19. ~ 2021. 12. 3.

- 변    경: 2021. 11. 19. ~ 2021. 12. 20.

- 변경사유: **************************************

- 지체상금: 미부과

붙임 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

							한강관광사업과장
주무관							전다솜			한강관광사업과장					11/30 김호규
협조자				주무관						조승만					기획예산과장							代이경춘
시행			한강관광사업과-5450									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3780-0735						/전송			02-3780-0740					/	j5678s@seoul.go.kr												/	부분공개(7)