문서번호	시설관리과-20145
보존기간	년
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	시설안전팀장	시설관리과장		서부수도사업소장
강철운	代박덕현	이준호		11/30 김정일
협 조

설계변경(2차) 심의위원회 개최결과 보고

[2021년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) ]

2021. 11.

시설관리과

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2021년 은평구 관내 상수도공사 (장기계속단가계약)

나. 공사기간 : 2021. 4. 30. ~ 2022. 6. 30.

다. 총도급비 : ************************************

라. 공사개요

- 당초 : D=15mm ~ 300mm, L=1,996m

- 변경 : D=15mm ~ 300mm, L=1,996m(변동없음)

마. 도 급 자 : **************

2. 보 고 내 용

가. 설계변경 사유

1) 2021년 각 공사별 예정물량의 증·감 및 신규공종에 따른 설계변경

- 신규공종 : 보호통 인상,하 외 6개 공종

- 물량증감 : 아스팔트포장절단 외 55개 공종

2) 공사비 변경내용

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	***********	***********	*************	아스팔트포장깨기 등
부 설 공	**********	***********	*************	스텐관부설공 (D=50mm)등
구조물공	**********	**********	*************	대형계량기실 설치공 등
부 대 공	**********	**********	*************	안전칸막이휀스 설치 및 철거 등
사급자재비	***********	***********	***********	스텐레스관 (13mm) 등
부가세 및 요율	***********	***********	***********	간접노무비 등
합 계	*************	*************	****

2) 총공사비 변경내용 (변동없음)

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
합 계		*************	*************	-
도급비	계	*************	*************	-
	공급가액	*************	*************	-
	부 가 세	***********	***********	-
기타 및 복구비		-	-	-

3. 조 치 의 견

위와 같이 신규공종, 시공물량 증․감 등으로 인한 설계 변경된 사항를 자체 심의한 결과에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고 행정지원과에 변경 계약 의뢰하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경심의위원회 개최 1부.

2. 설계변경요약서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의결과서 1부.  끝.