투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 승인 회신

1. 문서번호 대영GE21A-11-44호(2021. 11. 30.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 감리업무를 수행중인 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사의 설계변경 요청에 대하여 아래와 같이 승인하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2021. 07. 09. ~ 2021. 12. 05.

다. 계약업체 : ㈜서우이에프씨 대표 김명희

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	39,580,000원	34,232,000원	감) 5,348,000원

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	오태환		기전과장	11/30 서승완
협조자
시행	기전과-6657	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동)	/
전화	02-2657-7989	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개