투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰 (한강공원 주차장 노후 전기설비 개선공사) 수정

우리본부에서 시행중인 한강공원 주차장 노후 전기설비 개선공사에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 한강공원 주차장 노후 전기설비 개선공사

2. 공사기간 : 2021. 04. 19. ~ 2021. 11. 30.

3. 계약업체 : *******************

4. 계약금액 : ************

5. 변경사유 : 작업지시 등 현장여건에 따른 물량변경 및 제비율 등

6. 설계변경내역                                                  [단위 : 원]

구 분		당 초	변 경	증 , 감	비 고
도급비	공급가액	367,484,300	343,530,000	(감) 23,954,300
	부가세액	36,748,430	34,353,000	(감) 2,395,430
	계	404,232,730	377,883,000	(감) 26,349,730

붙임  1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 합의각서  1부.

3) 정산설계변경 내역서 1부.

4) 제비율 검증 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	성기학		기전설비과장	11/26 김상동
협조자
시행	기전설비과-6972	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동)	/
전화	02-3780-0673	/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)