“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인 「지봉로 장기사용 송배수관 정비공사」 의 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 용 역 명 : 지봉로 장기사용 송배수관 정비공사

나. 계약업체 : ******************

다. 계약금액 : ****************************

라. 준공기한 연기

- 당초 : 2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 5. (착공일 기준)

- 변경 : 2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 19.

마. 귀책소재 : 중부수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : ******************************

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 요청 공문 1식(서울시설공단).  끝.

	시설관리과장
★주무관	임상근		시설운영팀장	代유세종		시설관리과장	11/26 代유세종
협조자
시행	시설관리과-27656	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)