문서번호	방재시설부-15182
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		代최종구	11/30 박홍봉
협 조

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

준공기한 연기 검토보고

2021.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

준공기한 연기 검토보고

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」와 관련하여 공사기간 연장에 따른 총차 및 3차 용역 준공기한 연기에 대하여 검토 보고드림.

※ 관련공문 : 신상도감 2021-454호(2021.11.29.)

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

❍ 규    모 : 건설폐기물 운반 및 처리

❍ 용역기간 : 2019.4.1.~2021.12.31.(3차 2021.4.1.~2021.12.31.)

❍ 용 역 비 : 463,730,000원(3차 92,340,000원)

❍ 용 역 사 : ㈜삼양이앤디 외 1개사

Ⅱ		보고 내용

▢ 용역 계약현황

구 분	총 차	계약현황			장래분
		1차 (준공)	2차 (준공)	3차 (현재 계약분)
용 역 비	463,730,000원	151,390,000원	220,000,000원	92,340,000원	-
용역기간	2019.4.1. ~ 2021.12.31.	2019.4.1. ~ 2020.10.31.	2020.11.1. ~ 2021.3.31.	2021.4.1. ~ 2021.12.31.	-
용역규모	운반 6,750m3 처리 14,288톤	운반 2,412m3 처리 4,239톤	운반 3,100m3 처리 7,132톤	운반 1,238m3 처리 2,917톤	-

▢ 준공기한 연기 검토

❍ 연기사유

- 공사 준공기한이 연기(’21.12.31.→’22.4.30.)됨에 따라 원활한 건설폐기물 처리를 위해 용역 준공기한 연기 필요

❍ 연기내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총차	2019.4.1. ~ 2021.12.31.	2019.4.1. ~ 2022.4.30.	증 4개월
3차	2021.4.1. ~ 2021.12.31.	2021.4.1. ~ 2022.4.30.	증 4개월

※ 계약금액 변경 없음

Ⅲ		책임건설사업관리기술자 의견

❍ 공사 준공기한이 연기됨에 따라 용역 준공기한을 연기하여 건설폐기물을 원활하게 처리함이 타당하다고 사료됨.

Ⅵ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되는 바, 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.