문서번호	기전과-6654
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 11/30 서승완
협조

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고(2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

강서도로사업소

[기  전  과]

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사
실정보고사항 검토보고(2회)

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 관련 책임감리가 제출한 실정보고(2회)에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(화곡로입구 외 8개소) 현장 실정보고(2회)

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-11-31호(2021.11.25.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 양천구 목동오거리, 신정사거리, 청소년회관 앞, 화곡로입구,

영등포구 당산동, 양남교차로, 영등포유통상가, 구로구 거리공원오거리

○ 공사내용

- 목동오거리 : 신호현시 조정(신호등 신설 및 철거)

- 신정사거리 : 신호현시 조정(신호등 보강설치 및 원형변경)

- 청소년회관 앞 : 신호등 신설 및 철거

- 화곡로입구 : 신호등 신설

- 당산동교차로 : 신호현시 조정(노후 제어기 교체)

- 양남교차로 : 신호현시 조정(노후 제어기 교체)

- 영등포유통상가 : 신호현시 조정(신호등 신설)

- 거리공원오거리 : 신호등 신설 및 이설, 잔여시간표시기 설치

○ 계약금액 : 272,647,510원

○ 공사기간 : 2021.6.15. ∼ 2021.12.10.

○ 계약업체 : 해솔이엔씨(주) 대표 허지훈

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 실정보고 내용

○ 도급비 세부내역 : 증 10,406천원

(계약 272,647천원 → 1회 253,242천원 → 2회 263,648천원)

- 양남사거리 : 직접비 증 144천원

· 설계오류 LSU 추가 및 공사안내간판 내역 반영

- 거리공원오거리 : 직접비 증 4,372천원

· 노후 케이블 현장 여건에 맞게 접속 사용에 따른 물량 변경

· 설계 오류 차량 및 보행 신호등 철거 물량 증가

- 신정사거리 : 직접비 증 1,102천원

· 설계오류 LSU 감소 및 고장 음향신호기 추가 교체

· 현장 현시에 맞게 차량신호등 모듈 추가 교체

· 민원인(경찰서) 요청으로 보행등 이설 및 부착대 철거 물량 반영

- 청소년회관 앞 : 직접비 증 1,238천원

· 설계오류 LSU 추가, 차량 및 보행신호등 철거 물량 반영

· 현장의 시인성 향상을 위하여 지주(P8) 부착대(7M) 존치, 부착대     (3M) 철거 및 차량신호등 변경 물량 반영

- 영등포유통상가 : 직접비 증 105천원

· 전원선 추가 교체 예정 장소에서 선통불가 보도부분 일부 물량 제외

· 설계오류 보행신호등 철거 물량 추가

- 화곡로입구 : 직접비 감 2,049천원

· 설계오류 신호케이블 물량 변경 및 보행신호등 철거 물량 추가

- 영등포로터리 : 직접비 증 1,108천원

· 노후(구형) 맨홀 교체 추가

- 간접비(간접노무비 및 보험료 등 제경비) : 증 4,386천원

○ 관급(지급)자재 변경내용

- LSU 1개 증가, 차량신호등 1면3색(좌회전) 1조 증가, 차량신호등

녹색 모듈 1개 증가

※ 상세 내용 및 내역 붙임 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 책임감리 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에      따라 작업지시하고 추후 정산물량 반영 설계변경 시행

붙임  2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(화곡로입구 외        8개소) 현장 실정보고(2회) 1부.  끝.