문서번호	기전과-6652
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
오태환		11/30 서승완
협조

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  11.

강서도로사업소

[기  전  과]

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

설계변경 검토 보고

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사와 관련하여 감리업체가 제출한 설계변경서에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함.

□ 관련근거

○ 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 요청

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE21A-11-44호(2021. 11. 30.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 양천구 이마트 교차로 앞, 방송회관 교차로 앞

○ 공사내용

- 이마트 교차로 앞 : 신호기(차) 추가 설치

- 방송회관 교차로 앞 : 신호기(차) 추가 설치

○ 계약금액 : 39,580,000원

○ 공사기간 : 2021. 07. 09. ~ 2021. 12. 05.

○ 계약업체 : ㈜서우이에프씨 대표 김명희

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경 및 실제 시공물량 정산

- 보험료 등 제경비 정산

○ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액 (부가가치세 제외)
제어기 기초	재사용으로 물량 삭제(1->0)	감) 229천원
제어기 부분품	LSU 물량 감소(5->3) EXT-Flash 물량 삭제(1->0)	감) 541천원
잔여시간표시기	기설치로 물량 삭제(2->0)	감) 180천원
지주철거	철거 불가로 물량 감소(2->1)	감) 242천원
신호케이블	설계오류로 인한 케이블 물량 변경	증) 1,063천원
굴착 및 배관	기존 배관 선통 가능으로 물량 삭제 (굴착 : 20->1, 배관 : 19->0)	감) 1,484천원
가로등 암대	기설치 암대 재사용 불가로 물량 증가 (0->2)	증) 249천원
실작업물량정산	작업 후 케이블 및 물량 정산	감) 749천원
제경비	간접노무비 및 보험료 등	감) 2,748천원
합 계		감) 4,861천원

※ 상세 내용 및 내역 붙임문서(설계변경) 참조

□ 설계변경금액(총괄)

구 분	당 초	변 경	증 감 액
도 급 비	39,580,000원	34,232,000원	감)5,348,000원

□ 조치의견

○ 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 실제 시공물량 정산, 제경비 정산 등 수정 내용을 반영한 감리업체 설계변경 내용이 적정하여 이를 승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임  2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 요청 1부.  끝.