문서번호	동북권사업과-3639
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	발전기획팀장	동북권사업과장
정용우	이원희	11/30 오대중

- 동북권 청년혁신파크 및 시민안전체험관 조성사업 타당성조사 용역  -

설계변경(정산) 보고

2021. 11.

균형발전본부

(동북권사업과)

- 동북권 청년혁신파크 및 시민안전체험관 조성사업 타당성조사 용역 -

설계변경(정산) 보고

「 동북권 청년혁신파크 및 시민안전체험관 조성 사업 타당성조사」 용역의 설계변경(정산)에 대한 검토 보고임

□ 용역개요

❍ 용 역 명: 동북권 청년혁신파크 및 시민안전체험관 조성 사업 타당성조사

❍ 위    치: 서울특별시 도봉구 방학동 708번지

❍ 용역기간: ’20. 6. 26. ~ ’21. 11. 30.

❍ 규    모: 대지면적 10,883.8㎡

❍ 계약금액: 87,999천원

❍ 용 역 자: ㈜서경기술공사

❍ 주요과업: 현황자료 조사, 수요예측, 비용산정 및 편익추정 등

□ 추진경위

❍ '20.  6.19.	:	용역계약 및 착수

❍ '20.  7.29.	:	착수보고회 개최

❍ '20.  7. ~ 11.	:	관계부서 실무협의 6회(계속)

❍ '20.10.30.	:	용역 중간(자문)보고회 개최

❍ '20.12.19.	:	용역 변경계약(준공기한 연기, 1차)

- 당초 '20. 6.  26. ~ '20. 12.  22. ⇒  변경 '21.  3.  31.

❍ '20. 3.12.	:	용역 변경계약(준공기한 연기, 2차)

- 당초 '20. 6.  26. ~ '21.  3. 31. ⇒  변경 '21.  6. 30.

❍ '20. 6.22.	:	용역 변경계약(준공기한 연기, 3차)

- 당초 '20. 6.  26. ~ '21.  6. 30. ⇒  변경 '21. 11. 30.

❍ '21.11.26.	:	용역 최종(자문)보고회 개최

□ 설계변경(정산) 내용

❍ 계약기간: ’20. 6. 26. ~ ’21. 11. 30.(변경없음)

❍ 계약금액(변경있음)

- (당초) 87,999천원 → (변경) 87,284천원 (감 715,000원)

※ 직접경비 중 자문비 정산

항 목	세부항목	당초	변경	증·감	비고
직접인건비	-	29,960,290	29,960,290	변경없음
직접경비	보고서 작성	3,000,000	3,000,000	″
	자문비	1,500,000	850,000	감 650,000
제 경 비	직접인건비 × 110%	32,956,319	32,956,319	변경없음
기 술 료	(순용역원가+제경비) × 20%	12,582,482	12,582,482	변경없음
공급가액	순용역원가+제경비+기술료	79,999,091	79,349,091	감 650,000
부가가치세	-	7,999,909	7,934,090	감 65,000
계	-	87,999,000	87,284,000	감 715,000

□ 향후계획

○ '21. 11. 30.	변경 계약 및 용역 준공(준공계 접수)

○ '21. 12월 중	용역 준공검사

붙  임  1) 합의각서(변경) 1부.

2) 변경내역서 1부.  끝.