투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(휴일작업계획 및 토목(상주) 건설사업관리기술인 이탈계 승인 통보(AI 지원센터 건립공사))

1.업무지시현장 : AI지원센터 건립공사(장기1차) (주)종합건축사사무소근정, AI지원센터

건립공사(장기1차) 주식회사 동해종합기술공사

2.작 성 일 자 : 2021-11-30 09:11:05

3.지 시 내 용 :

가. 근정 제2021-260호 및 근정(관) 제2021-261호(2021.11.29.)와 관련한 사항입니다.

나. 귀 사에서 진행중인「AI 지원센터 건립공사」와 관련하여 12월 휴일작업계획 및 토목(상주) 건설사업관리기술인 이탈계를 승인 통보하오니 공사현장에서의 전반적인 안전·품질 관리에 철저를 기하시기 바라며, 작업 중 소음 등으로 인한 주민 불편사항이 발생하지 않도록 관리하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 작업중에는 필히 건설사업관리기술인 입회하에 진행하시어 공사관계자 부재·공백이 발생하지 않도록 유념하시기 바라며, 비상연락망 유지 및 업무대행자와의 철저한 업무 인수·인계하여 주시기 바랍니다.

라. ① 12월 휴일작업계획

구 분	공 종	주요작업내용	일자별 근무자
			건설사업관리단	시공사
2021.12.04.(토)	토목	Ppst파일 천공 및 근입	*******	*******
2021.12.11.(토)		Ppst 파일 및 Raker 파일 천공	*******	*******
2021.12.12.(일)		Ppst 파일 및 Raker 파일 천공, 토사반출	*******	*******
2021.12.18.(토)		1단띠장 설치 및 토사 반출	*******	*******
2021.12.19.(일)		1단띠장 설치 및 토사 반출	*******	*******
2021.12.25.(토)		1단띠장 및 Raker설치, 토사 반출	*******	*******
2021.12.26.(일)		1단띠장 및 Raker설치, 토사 반출	*******	*******

② 토목(상주) 건설사업관리기술인 이탈계

- 이탈자: *******

- 일자: 2021.12.3.(금)

- 이탈사유: **

- 업무대행자: *******.   끝.

주무관							최진규			환경시설과장					정채문					건축부장					12/01 신명승
협조자				주무관						조은주					주무관							김성권
시행			건축부-19353									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2647						/전송			02)3708-2659					/	cjk3825@seoul.go.kr												/	부분공개(5)