문서번호	시설과-8769
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장
김병수		전결 12/01 안재순
협 조

서울대공원 종보전지구 조성공사(전기,소방) 외 1건

설계변경 검토 보고

2021. 12.

서 울 대 공 원

시 설 과

서울대공원 종보전지구 조성공사(전기,소방) 외 1건

설계변경 검토 보고

우리 대공원에서 실시중인 “서울대공원 종보전지구 조성공사(전기,소방)” 및 해당공사의 감리용역에 대하여 계약(공사)기간을 변경 시행코자함

1		설계변경 대상 개요

1. 서울대공원 종보전지구 조성공사(전기,소방)

● 공사기간 : *************************

● 공사내용

- 종보전지구 일대 전기시설물 공사

· 리모델링 대상 건물 내 전열 · 전등설비 신설, 분전반 교체 등

● 계약금액 : *************

● 계약업체 : ******************

2. 서울대공원 종보전지구 조성공사(전기) 감리용역

● 착수기간 : *************************

● 계약금액 : ************

● 계약업체 : *********************

2		설계변경 내용

● 계약물량 변경 등 없이 공사기간만 변경코자 함

● 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사관리기능 및 야생동물 종보전, 생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선, 시설비및부대비, 시설비(연차별 동물사 리모델링 추진)

● 주요 물량 및 금액 변경 : 해당없음

● 전기공사 ·용역 착수기간 : 2022년 7월 31일까지 연장

- 변경 사유 : 타 공종 이후 진행가능한 전기공사(들소사 야외 케이블 포설 등)특성 상 기간을 연장하여 실시코자 함

3		행정사항

● 설계변경에 따른 변경계약 의뢰 실시.  끝.