문서번호	교량안전과-18158
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
신익현		위성환	12/01 조현석
협조

- 2021년 마포대교 보수공사 -

설계변경(1회) 검토 보고

2021. 12.

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

- 2021년 마포대교 보수공사 -

설계변경(1회-정산) 검토 보고

2021년 마포대교 보수공사가 완료됨에 따라 현장여건 등을 반영한 설계 변경사항에 대한 책임건설사업관리기술인 검토의견서가 제출되어 검토 결과를 보고 드림.

1		관 련 근 거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경), 제7절(계약금액의 조정)

○ 설계변경 도서제출(동기공 2021-6930호, ‘21.11.26)

2		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2021년 마포대교 보수공사

○ 공사기간 : ‘21.05.10. ~ ’21.12.05

○ 도 급 자 : ㈜대한하이텍건설 대표 이평원

○ 총공사비 : 금1,789,140천원

(*************************************)

○ 공사개요 : 교면포장 및 방수 158.6a, 상판보수 10㎡

3		변 경 내 용

□ 현장 실측결과에 따른 공사 물량 증.감 사항 반영

□ 규격변경, 공종추가, 시공방법 변경 등에 따른 공종 적용

○ 관련근거 : 지방계약법 제74조 및 공사계약 일반조건 제6~7절(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

- 기존공종 물량 증·감 : 계약단가 적용

- 신규공종 적용비목 : 낙찰율(*******) 적용(설계변경당시 산정한 단가에 낙찰률 협의 적용)

□ 건강보험, 국민연금보험, 고용개선지원비 등 제경비 정산

○ 주요 공종 증·감

구 분		단위	주요 수량			비고
			당초	변경	증,감
포 장 공	절삭 후 아스팔트 덧씌우기(차도부)	a	*******	*******	*****
	절삭 후 덧씌우기(보도부)	a	******	******	******
	주입줄눈공	M	*********	*********	*********
	교면방수	㎡	**********	**********	*********
콘크리트 보수공	상판보수(야간,T=30㎜,MMA)	㎡	***	*******	*******
	상판보수(야간,T=50㎜,MMA)	㎡	******	******	******

○ 관급자재 및 건설폐기물 변경

구 분		단위	수량 증・감			비고
			당초	변경	증,감
관급자재	아스콘(표층용, WC-6)	톤	*****	*****	***
	아스콘(표층용, WC-2)	톤	***	***	***
	도막형바닥재(열경화성MMA)	m2	*****	*****	******
폐기물처리	폐콘크리트(덩어리)	톤	*	**	**
	폐아스콘(평삭재)	톤	*****	*****	***
	혼합폐기물(아스콘혼폐)	톤	***	***	***

4		검 토 결 과

○ 책임건설사업관리기술자 의견

- 설계 변경사항

· 주요수량 및 공사비 : 현장 실측수량 및 보고결과 반영

· 제경비 정산 : 국민건강보험, 국민연금보험, 노인장기요양보험,

산업안전보건관리비, 퇴직공제부금, 고용개선지원비 등

- 적용단가 : 기존비목(계약단가), 신규비목(************)

- 공사기간 : 변경 없음(2021. 5. 10 ~ 2021. 12. 5)

○ 공사비 증·감 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총공사비	*************	*************	*	***********
도 급 비	*************	*************	*	**********
관 급 비	***********	***********	*	**********
이 전 비	***********	**********	*	**********

5		조 치 의 견

○ 상기 검토결과와 같이 건설사업관리단에서 보고한 설계변경은 적정한 것으로 판단되므로 설계변경하고 변경계약 시행하고자 함

붙 임 : 1. 감리단 설계변경 검토 보고서 및 현장사진 각 1부.

2. 변경설계내역서 및 변경도면(별첨) 각 1부.

3. 제비율 검증 확인서 1부. 끝.