문서번호	기반시설과-7738
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

					시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
안재선	라철흠	12/01 박상보
협 조

공사현장 실정사항(2차) 검토보고

- 한강변 보행네트워크 조성 전기공사 -

2021. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

공사현장 실정사항(2차) 검토보고

- 한강변 보행네트워크 조성 전기공사 -

『한강변 보행네트워크 조성 전기공사』중 경관조명 공사구역 변경 등 물량 증감 및 현장 여건과 부합하지 않는 공종을 현장에 맞게 조정코자 함

1		검 토 근 거

◯ 공사현장 실정보고(2차) 승인 요청(공사감독3처-12871호, 2021. 11. 30.)

2		공 사 개 요

◯ 건    명 : 한강변 보행네트워크 조성 전기공사

◯ 위    치 : 여의나루역 ∼ 동작역 간 수변 보행로 일대

◯ 시행부서 : 한강사업본부(정책부서 도시공간개선단)

◯ 설 계 사 :*********************

◯ 공사기간 : 2021. 1. 29. ~ 2021. 12. 31.

◯ 공사금액 : *****************************

◯ 도 급 자 : **************

◯ 감독부서 : 서울시설공단 공사감독3처

3		설계의견 검토

구분	설계의견 검토	검토 결과	비고
조명	○ 노량대교 경관조명 - 원효대교에서 노량대교로 공사구간이 변경되어, 기존 내역서상 변경사항 추가 반영 ※ 추가 내역 - 분전반 교체(10회로) - 강제전선관 설치(아연도 36mm) - 전원케이블 설치(F-CV 10.0㎟ / 1C (4열동시)) - 브라켓 설치(W60×D70×L2000) - 방수분전함 박스 설치(W300×H400×D200) - 접지케이블 설치(F-GV 6.0㎟) - 라인바 설치(14W/m) - 전원케이블(라인바) 설치(VCTF 1.5㎟/2C)	○ 노량대교 선형조명 설치를 위한 공사내역 추가 반영 필요. 현장여건에 맞게 시공 후 설계변경시 반영 ○ 브라켓 사이즈, 설치위치 및 각도상 브라켓 내에 전원케이블(F-CV) 설치 불가 및 추후 전선 보호를 위해 전원배관용 강제전선관 설치 필요 ○ 분전반 교체가 이루어짐에 따라 기존 분전반 고재 처리 추가 필요
	○ 신설 노량대교 하부 보행데크 - 공사 구간의 조도가 낮아 등기구 설치 필요	○ 현장여건에 맞게 설치 후 설계변경시 반영 - 등기구 설치 : 0개 → 2개
	○ 수목등 - 공사계획 변경 및 배관배선시 주변 도로 복구작업의 어려움 등으로 제외 필요	○ 수목등 설치에 관한 내역 제외 후 설계변경시 반영 - 수목등 설치 : 6개소 → 0개소
	○ 공원등 - 기존 가로등이 있어 조도가 낮지 않고 조경 공사내용 변경으로 인한 등주 수량 조정 필요	○ 해당구역 등주 수량 조정 및 관련항목 반영하여 현장여건에 맞게 설치 후 설계변경시 반영 - 등주 설치 : 8본 -> 2본

4		실정보고 검토

구분	현황 및 문제점	검토 결과	비고
기초 설치	○ 한강공원에 설치되는 규격에 맞게 공원등 기초 규격(500×800×1000) 변경 필요	○ 한강공원 여건에 맞게 기초규격을 변경
	○ 연결거점 C05, C06구역 지중 지장물(상수관로, 전기 통신 배관 등)이 존재하여 기초설치가 불가함. 기초 규격을 500×800×800로 축소 변경 필요	○ 해당 구역은 기초규격 변경, 위치 조정 등 현장여건에 맞게 설치 후 설계변경 시 반영
	○ 공원등 설치 위치에 구조물이 존재하는 등 기성기초 설치 불가한 일부 개소 케미컬 앙카 필요	○ 해당 개소에 대하여 케미컬 앙카 시공 후 설계변경시 반영
배관	○ 연결거점 C09 구역(동작역 앞) 지중 콘크리트 구조물 존재로 배관 심도 확보 불가	○ 배관설치시 심도 확보가 불가한 구간은 현장여건에 맞게 강제전선관(22C)으로 시공 후 설계변경시 반영

5		개략공사비 반영

구 분	공 사 비(원)			증 감	비 고
	계약금액	변경금액(1차)	변경금액(2차)
공 급 가 액	52,341,820	97,611,330	143,025,372	증) 90,683,552
부 가 세	5,234,180	9,761,130	14,302,530	증) 9,068,350
합 계	57,576,000	107,372,460	157,327,902	증) 99,751,902
관 급 자 재	207,702,549	119,915,040	121,214,010	감) -86,488,539
총 계	265,278,549	227,287,500	278,541,912	증) 13,263,363

※ 상기 금액은 개략공사비로서 차후 설계변경시 증(감) 등 변경 될 수 있음.

6		검 토 의 견

◯ 설계의견 검토

- 경관조명 설치구역이 원효대교에서 노량대교로 변경됨에 따라, 관급 물량에 포함된 원효대교 공사물량이 제외되었으며, 노량대교 공사물량분을 도급액에 추가반영하여 공사를 진행코자 함

◯ 실정보고 검토

- 한강공원 설치 규격에 맞는 공원등 기초로 변경하고, 지장물이 있는 특정 구역의 경우 기초 설치 불가로 규격을 축소 설치코자 함

7		행 정 사 항

◯ 설계의견 및 실정보고(2차) 검토사항 설계반영 회신(서울시설공단)

붙임   1. 관련 공문서  1부.

2. 공사현장 실정보고  1부.

3. 개략공사비 산출내역  1부. 끝.