문서번호	방재시설부-15270
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		김태중	12/01 박홍봉
협 조
	주무관			김소연

신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

설계변경(총차 5회, 3차 2회) 및 준공기한 연기 검토 보고

2021.12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

설계변경(총차 5회, 3차 2회) 및 준공기한 연기 검토 보고

「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」과 관련하여 설계변경(총차 5회, 3차 2회) 및 준공기한 연기에 대하여 검토 보고드림.   ※ 관련공문 : 극동(건사) 21-1684호(2021.12.1.)

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명: 신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

❍ 용역기간: 2019.3.4.~2022.1.26.(3차 2021.1.7.~2022.1.26.)

❍ 용 역 비: 1,375,600,000원(3차 805,600,000원)

❍ 용 역 사: 극동엔지니어링㈜ 외 2개사

Ⅱ		보고내용

▢ 설계변경 및 준공기한 연기 검토

❍ 주요 변경내용

- 공사 준공기한 연기(`21.12.→`22.4.)에 따른 용역 준공기한 연기

- 상주 건설사업관리기술자 배치등급 하향 조정(`22.1.1.~`22.5.26.)

· 책임 : 고급 → 중급 / 토목·전기·조경 : 중급 → 초급 / 안전 : 초급 → 초급

- 동절기 기간(`22.1.~`22.2.) 현장 유지관리 위해 최소인력 투입 반영

· 책임·토목 : 2주/월 × 2개월 = 4주 근무

· 전기·조경·안전 : 1주/월 × 2개월 = 2주 근무

- 용역기간 연장에 따른 물가상승금액(41,740천원) 반영

❍ 총차 5회 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
용 역 비		1,375,600,000원	1,583,600,000원	증 208,000,000원
용역기간		`19.3.4.~`22.1.26.	`19.3.4.~`22.5.26.	증 4.0개월
투입계획	책임기술자 토목(중급) 분야별기술자 토목(초급) 분야별기술자 안전 분야별기술자 전기 분야별기술자 조경 분야별기술자	1인 26.0개월 1인 26.0개월 1인 0.35개월 1인 18.8개월 1인 5.0개월 1인 3.0개월	1인 29.16개월 1인 29.16개월 1인 0.35개월 1인 21.50개월 1인 6.66개월 1인 6.04개월	증 3.16개월 증 3.16개월 변경 없음 증 2.66개월 증 1.66개월 증 3.04개월

❍ 3차 2회 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
용 역 비		805,600,000원	1,013,600,000원	증 208,000,000원
용역기간		`21.1.7.~`22.1.26.	`21.1.7.~`22.5.26.	증 4.0개월
투입 계획	책임기술자 토목(중급) 분야별기술자 토목(초급) 분야별기술자 안전 분야별기술자 전기 분야별기술자 조경 분야별기술자	1인 12.65개월 1인 12.65개월 1인 0.35개월 1인 12.65개월 1인 5.0개월 1인 3.0개월	1인 15.81개월 1인 15.81개월 1인 0.35개월 1인 15.31개월 1인 6.66개월 1인 6.04개월	증 3.16개월 증 3.16개월 변경 없음 증 2.66개월 증 1.66개월 증 3.04개월

Ⅲ		조치계획

❍ 위와 같이 설계변경 및 준공기한 연기함이 적정한 것으로 판단됨에 따라 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리용역 설계변경도서 제출 1부.  끝.