문서번호	영동대로복합개발추진단-8769
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사업총괄과장	영동대로복합개발추진단장
방종희		이재혁	12/01 이승석
협 조
	재무과장			전성권

영동대로 지하공간 복합개발 사업

사후지하안전영향조사용역 준공기한 연기 검토보고

2021. 12.

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

영동대로 지하공간 복합개발 사업

사후지하안전영향조사용역 준공기한 연기 검토보고

영동대로 지하공간 복합개발사업 관련 지하안전에 미치는 영향을 조사하기 위해 시행 중인 사후지하안전영향조사 용역에 대한 준공기한(1차)를 아래와 같이 연기코자 함

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 영동대로복합개발사업 사후지하안전영향조사 용역

○ 용역기간 : ‘21. 8. 2. ~ ’28. 3.27.(1차 ‘21. 8. 2.~’21.12.31.)

○ 용 역 비 : 금130,000,000원(1차 9,300,000원)

○ 용 역 사 : ㈜에스코컨설턴트 대표 박치면

□ 추진경위

○ '21.05.03.	: 사후지하안전영향조사 용역발주

○ '21.08.02.	: 사후지하안전영향조사 용역계약 및 착수

○ '21.08.31. : 사후지하안전영향조사 착수보고회 개최

□ 검토내용

**********

************************************************************

********

****************************************************

□ 검토내용

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간(전체)	‘21. 8. 2.~’28. 3.27.	변경 없음
계약기간(1차)	‘21. 8. 2.~’21.12.31.	‘21. 8. 2.~’22. 6. 1.
계 약 금 액	금130,000,000원 (1차9,300,000원)	변경 없음

***********

***********************************************************************

******************

따로 붙임 : 관련공문 및 합의각서 1부.  끝.