문서번호	홍보과-9181
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		홍보과장	경영관리부장
김규택		박희복	12/01 김영기
협조
	홍보기획팀장		홍기석

-아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역-

세출예산 사고이월 계획 보고

2021년 12월

상수도사업본부

(홍보과)

- 아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역 -

세출예산 사고이월 계획 보고

수돗물 홍보관「아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역」과 관련하여 2021년도 세출예산 사고이월 계획을 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역

(전시·체험물 설계 및 제작·설치)

○ 용역기간 : ’21. 9. 27. ~ ’22. 4. 26.(계약일로부터 7개월)

○ 용역업체 : ㈜플러스스페이스

○ 용역금액 : 950,000천원

○ 용역내용 : 리뉴얼 기본 및 실시설계, 전시·체험물 제작 및 설치

□ 예산집행 현황

○ 예산현액 : 1,200,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비(시민과 소통하는 아리수 홍보).

○ 집행내역

(단위 : 원)

예산현액	(재)배정액	원인행위액	지 출 액	사고이월액	불 용 액 (낙찰차액)
1,200,000,000	1,200,000,000	950,000,000	-	950,000,000	250,000,000

□ 사고이월 사유

○ 본 용역은 미래세대인 유아·어린이 대상 체험과 놀이를 통한 수돗물 홍보를 목표로 전시·체험물, 영상 등 홍보 콘텐츠를 리뉴얼 하는 사업임

○ 서울시 유일의 수돗물 홍보관으로서 경쟁력을 갖추기 위한 현장상황 점검, 공간 구성 및 재배치, 안전, 홍보대상, 기본 콘텐츠 등 전문가 의견 검토로 사업계획 수립이 지연되어, ‘21년 3분기(‘21.7.21.) 용역을 발주 하였음

□ 사업추진 현황

- ‘21.2. ~ ’21.5.  : 현장상황 점검 및 사업계획 검토

- ‘21.6.            : 아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 추진계획 수립

- ‘21.7.            : 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역 계획 수립(용역발주)

- ‘21.7. ~ ’21.9.  : 사전규격 공개, 일상감사, 입찰공고, 제안서 평가 등

- ‘21.9.            : 용역 계약 체결

- ‘21.10. ~’21.11. : 착수보고회 및 자문회의 개최

○ 현재 기본 및 실시설계 진행 중이며, ‘22. 01월 선급금(70%)을

지급할 예정이고, 준공기한은 ’22. 04월 까지임(용역준공기한 미도래)

□ 조치의견

○ 위와 같은 사유로 원활한 사업추진과 효율적 예산집행을 위하여 2021년도 해당 사업(용역) 예산 950,000천원을 사고이월 하고자 함

따로붙임 : 1. 이월 요구서 1부.

2. 이월 사업별 명세서 1부.

3. 지출원인행위부 1부.

4. 용역계약서 1부.  끝.