투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역)

우리부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사 건설페기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

2. 계약금액 : 463,730,000원(3차 92,340,000원)

3. 용역기간 : 2019.4.1. ~ 2021.12.31.(3차 2021.4.1. ~ 2021.12.31.)

4. 계 약 자 : ㈜삼양이앤디 외 1개사(대표 최훈성)

5. 준공기한 연기

구 분		당 초	변 경	비 고
용역 기간	총차	2019.4.1.~2021.12.31.	2019.4.1.~2022.4.30.	증 4개월
	3차	2021.4.1.~2021.12.31.	2021.4.1.~2022.4.30.	증 4개월

붙임  1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	12/01 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-15209	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)