투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 계약 의뢰 [월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치공사]

우리 부에서 시행 중인『월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치공사

2. 공사개요 : 연결램프 2개소

3. 계 약 자 : 동아건설산업(주) 외 1개사

4. 준공기한 연기 내용

구 분	당 초	변 경	증･감	비고
전체	‘19.01.07~’21.11.30	‘19.01.07~’21.12.31	증) 31일
2차	‘20.01.02~’21.11.30	‘20.01.02~’21.12.31	증) 31일

5. 연기사유

- **************************************************

6. 연기 귀책사유: 서울특별시 도시기반시설본부

7. 지체상금 부과: 미부과

8. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 월드컵대교 건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 및 설계변경 내역서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	조재근		토목총괄과장	진재섭		토목부장	12/01 임춘근
협조자	주무관	강대호
시행	토목부-22169	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2549	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)