문서번호	시설관리과-28183
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(3 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
임상근	이유찬	代이유찬		12/02 김정애
협 조
	주무관		이봉우
	주무관		이보민

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

수계환원 시행 계획 보고

(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

2021. 12.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

수계환원 시행 계획 보고

(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

시설관리공단에 책임감리 위탁중인「지봉로 장기사용 송배수관 정비공사」시행을 위해 전환한 수계를 본래 수계로 환원하고자 계획을 보고드림.

※ 관련 근거: 시설관리과-22877(2021. 9. 30.)호

※ 본부 배수과-6200(2019. 6. 29.)호, 배수과-4415(2020. 5. 6.)호 관련

Ⅰ		공사개요

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 지봉로 장기사용 송배수관 정비공사

❍ 공사위치 : *********************

❍ 공사개요 : D= 300~700mm, L= 394m

❍ 공사기간 : 2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 19.

❍ 시 공 사 : ******************

❍ 감 독 청 : ********************************

□ 위 치 도

Ⅱ		보고내용

□ 수계환원 내용

❍ 송배수관 공사 구간의 차수를 위해 흥인지문 교차로에서 낙산가압장 방향으로 전환하였던 수계를 기존 청계천에서 낙산가압장 방향 공급 수계로 환원하고자 함.

□ 수계환원 개념도

□ 세부 추진 계획

❍ 시행일자(예정)

- 2021. 12. 20.(월) ~ 12. 24.(금)

❍ 수계전환 시행 절차

1. 청계천 사거리 D700 중간밸브 (①, 폐 → 개)

2. 동묘앞역 부근 D700 중간밸브 (②, 폐 → 개)

3. 동대문역 부근 D900 중간밸브 (③, 개 → 폐)

❍ 수계운영 인원

- 공사담당자, 직반장, 지원 인력 등 5명

- 수질팀 직원 2명, 제어실 직원 1명

Ⅲ		행정사항

□ 수계전환 전, 후 지속적인 모니터링 시행

❍ 소․불출수 및 혼탁수, 녹물 출수 등 수질변화 모니터링

❍ 수계전환 후 예상되는 민원 등 대응방안 검토

❍ 비상급수운영반 운영: 지역팀, 수계조절요원, 수질팀 및 기전팀 담당자

□ 수계전환에 따른 업무협조 체제 유지

❍ 수계전환 계획 통보 및 협의(본부 배수과)

❍ 소블록 내 수질검사 지원(중부 행정지원과 수질팀)

❍ 블록별 유출입 모니터링(중부 시설관리과 기전팀)

❍ 혼탁수 출수 대비 병물아리수 및 급수차 비상대기

❍ 비상 카톡방 운영 정보공유.  끝.