투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

1. 영동대로복합개발추진단-7585(2021. 10. 15.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 영동대로 지하공간 복합개발사업 사후지하안전영향조사 용역에 대해 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명: 영동대로 지하공간 복합개발사업 사후지하안전영향조사 용역

2) 계약기간: 2021. 8. 2. ~ 2028.3. 27.

3) 계약금액: 130,000,000원(1차 9,300,000원)

4) 용역업체: ㈜에스코컨설턴트 대표 박치면

나. 준공기한 변경내역(계약금액 변경 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간 (전체)	2021. 8. 2. ~ 2028. 3.27.	2021. 8. 2. ~ 2028. 3.27.	변경없음
용역기간 (1차)	2021. 8. 2. ~ 2021.12.31.	2021. 8. 2. ~ 2022. 6. 1.	증)152일
용역금액	130,000,000원(1차 9,300,000원)	130,000,000원(1차 9,300,000원)	변경없음

다. 귀책사유: 서울특별시

라. 지체상금: 미부과

마. 변경사유: 영동대로 지하공간 복합개발 굴착공사(가시설) 미착수에 따른 사후지하안전영향조사용역 1차 과업기간 연장 필요

바. 예산과목: 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업, 영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비(210-401-01)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	영동대로복합개발추진단장
주무관	방종희		사업총괄과장	이재혁		영동대로복합개발추진단장	12/02 이승석
협조자
시행	영동대로복합개발추진단-8825	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 3층	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)