“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(금하마을 간선배관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『금하마을 간선배관 정비공사』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 금하마을 간선배관 정비공사

나. 계 약 자 : 대흥토건㈜   대표자 한명선

다. 계약기간 : 2021. 09. 27. ~ 2022. 01. 28.

라. 공사개요 : D=20~300mm, L=646m

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
공급 가액	173,484,546	156,540,000	감 16,944,546
부가가치세	17,348,454	15,654,000	감 1,694,454
도 급 비	190,833,000	172,194,000	감 18,639,000	감 9.7%

바. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 공종별 물량 증,감

사. 예산과목 :  자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(간선배관 정비)

붙임  1) 설계변경 관련서류 각1부.

2) 심의의결서 및 합의서 각1부.  끝.

주무관	서장원		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	代류태현		남부수도사업소장	12/02 박병성
협조자	주무관	代김동욱		행정지원과장	홍기관
시행	급수운영과-20124	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/
전화	(02)3146-4637	/전송	(02)3146-4589	/	sjangwon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)