문서번호	시설과-8805
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장
김성현	代김희원		전결 12/02 안재순
협 조

2021년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경(정산) 검토 보고

2021.12

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)
설계변경(정산) 검토 보고

우리 대공원에서 시행 중인 “2021년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)”와 관련하여 계약물량, 신규내역 추가 및 제경비 정산에 따른 설계변경을 시행하고 준공처리하고자 보고드림

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2021.2.16. ~ 12.31.

○ 공사내용

․ 주변전실 및 지구변전실 15개소 전기설비 유지관리

․ 업무시설 및 동물사 185동 전기설비 유지관리

․ 공원등 및 기타 전기설비 유지관리

○ 계 약 자 : ****************

○ 계약금액 : ************

2		공사내용

○ 주요 작업지시 및 정비 내용

․ 각 동물사 및 공원 내 설비 증설 및 노후에 따른 전력간선공사 시행

․ 각 동물사 및 공원 내 전등 및 전열공사 시행

․ 각 동물사 및 공원 내 노후 분전반, 차단기 및 속판 교체 시행

․ 각 동물사 및 공원 내 기계설비 전원공사 시행

․ AZA인증 후속조치 위해도 평가 및 현장점검에 따른 동물사별 요구사항 조치

3		설계변경 내용

○ 계약물량 변경 및 신규 내역 추가

○ 각 제경비 정산

○ 예산과목: ******************************

*****************************

****************************

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
도급비	공사원가	***********	***********	*
	부가가치세	**********	**********	*
	총 계	***********	***********	*

4		조치 계획

○ 상기 변경내용과 같이 변경계약(정산)을 시행하고 준공하고자 함

5		행정 사항

○ 설계변경에 따른 변경계약(정산) 시행

○ 공사 준공 및 대금지급

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부. 끝.