문서번호	토목과-17033
결재일자	2021.12.2.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
서재관		代차정권		이호진		12/02 최연우
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		이은술

★ ◉

-연무장길 야간경관조명 설치공사 건설폐기물 처리용역-

설계변경(최종) 검토 보고

2021. 12.

(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( 보행정책과 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

-연무장길 야간경관조명 설치공사 건설폐기물 처리용역-

설계변경(최종) 검토 보고

우리 구에서 시행 중인 ‘연무장길 야간경관조명 설치 공사’와 관련하여 민원에 의한 사업변경에 따른 공사 폐기물 증가 물량을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

□ 관련 근거

○ 연무장길 일대 보행친화형 도로공간 조성 사업 변경 계획

- 토목과-14225(2021.10.18.)

□ 용역 개요

○ 용 역 명: 연무장길 야간경관조명 설치공사 건설폐기물 처리용역

○ 위    치: 연무장길 외 8개소

○ 기    간: 2021. 5. 28. ~ 2021. 12. 15.

○ 계약업체: ㈜대아 이디아이  대표 김상회

○ 규    모: 폐아스콘 운반 117㎥, 폐아스콘 처리 274ton

○ 용 역 비: 10,185천 원

□ 설계변경 사유

○ 민원(디자인보안등 이설, 철거 요청)에 의한 아스팔트 재굴착 및 디자인 보안등주 기초 철거로 인한 건설폐기물 물량 증가

○ 대체지 노후 보안등주 기초 및 보도블록 폐기물 증가

○ 주요 물량 증·감액

연 번	공 종	규 격	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
1	폐아스콘 운반	0.7BH×DT 24톤, L=25km	117㎥	165㎥	48㎥
2	폐아스콘 처리	단위중량 2.35ton/㎥	274ton	387ton	113ton
3	폐콘크리트 운반	0.7BH×DT 24톤, L=25km	-	40㎥	40㎥
4	폐콘크리트 처리	단위중량 2.30ton/㎥	-	92ton	92ton

□ 보고내용

○ 설계변경(최종) 내역

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총용역비		10,185,000	17,708,000	증 7,523,000
용역비	공급가액	9,259,091	16,098,182	증 6,839,091
	부가가치세	925,909	1,609,818	증 683,909
	계	10,185,000	17,708,000	증 7,523,000

※ 예산과목

- 토목과, 지방도 건설 및 확대포장, 도로관리사업, 보행환경개선지구 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 조치계획

○ 실제 공사 폐기물 정산에 따른 변경사항을 반영하여 계약금액 조정 하여 설계변경 하고자 함.

붙임  1) 변경내역서 1부.

2) 방침서 1부.  끝.