문서번호	설비부-17464
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김현기	12/02 김호성

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』

계약기간 연장 및 설계변경 검토보고

2021. 12월

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』

계약기간 연장 및 설계변경 검토 보고

『남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사』에 대한 계약기간(3차) 연장 및 설계변경(총차, 3차) 사항에 대하여 검토 보고 드림

***************************

***************************************************************

*****************************************************

********************************************************

1		공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사

○ 위    치 : 구로구 남부순환로 오류IC ~ 매봉초등학교(1.1km)

○ 규    모 : 가로등 54본, 분전반 4대, 교통신호등 11본, 신호제어기 2대 설치

○ 계약현황

차 수	계 약 금 액(원)	계 약 기 간	계 약 업 체
***	***********	*************************	*********
****	***********	*************************

○ 건설사업관리단 : *******************

2		관련근거

○ 전기공사 제1회 실정보고(가로등 이설) : 설비부-10504호(’21.07.23.)

○ 전기공사 제2회 실정보고(임시 보안등 가공전선 이설)

: 설비부-14115호(’21.10.05.)

○ 건설사업관리단 계약기간 연장 및 설계변경 보고

: 동일(감리)제21-3288호(2021.12.02.)

3		검토내용

▢ 계약기간 연장 사항(3차)

○ 계약기간 연장 사유

***************************************************

○ 계약기간 연장 내역

차 수	계약기간		비 고
	당 초	변 경
***	*************************	*************************	****
***	*************************	*************************	******

▢ 설계 변경 사항(총차, 3차)

○ 설계 변경 사유

*************************

*********************

○ 설계 변경 내용

- 주요 변경내용

**************************************************

*************************************************

******************************************

**************************************

- 주요물량 변경사항

품 명	규 격	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ‧ 감
***********	*******	**	***	***	*******
***********	*******	**	***	***	*******
***********	******	**	**	**	*******
******************	********************	*	****	******	*******
*****************	********************	*	******	******	*******
********	**********	*	****	******	*******

- 도급비 변경내역

· 총차

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
***********	***************	***********	***********	*************
	*****	***********	***********	*
	*******	***********	***********	*************
***********		***********	***********	*************
*******		*********	**********	*************
**********		***********	***********	*************
*********		**********	**********	*************
************		***********	***********	*************

· 3차

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
***********	***************	*********	**********	*************
	*****	**********	**********	*
	*******	**********	**********	*************
***********		**********	**********	*************
*******		*********	*********	*************
**********		***********	***********	*************
*********		**********	**********	*************
************		***********	***********	*************

- 계약금액 변경

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ‧ 감 액
****	***********	***********	*************
*****	***********	***********	*************

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행 공정(토목)의 지연에 따라 해당 전기공사의 3차 준공기한을 변경(연장)함이 적정하다고 사료되며

- 실정보고 승인건에 대한 설계변경 내역을 면밀히 검토한 결과 적정히 반영됨

4		보고자 의견

○ 건설사업관리단이 제출한 계약기간 연장(3차) 및 설계변경(총차, 3차) 검토의견이 적정하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 공문 1부