투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차 5회, 3차 2회) 및 준공기한 연기 계약 의뢰(신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

우리 부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 5회, 3차 2회) 및 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계 약 명 : 신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 계약금액 : 1,375,600,000원(3차 805,600,000원)

3. 계약기간 : 2019.3.4. ~ 2022.1.26.(3차 2021.1.7. ~ 2022.1.26.)

4. 계 약 자 : 극동엔지니어링(주) 외 2개사(대표 성낙일)

5. 변경내역

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	총차	1,375,600,000원	1,583,600,000원	증 208,000,000원
	3차	805,600,000원	1,013,600,000원	증 208,000,000원
계약 기간	총차	2019.3.4. ~ 2022.1.26.	2019.3.4. ~ 2022.5.26.	증 4개월
	3차	2021.1.7.~ 2022.1.26.	2021.1.7.~ 2022.5.26.	증 4개월

6. 예산과목 : 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비및부대비, 감리비

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 2부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	12/02 代김태중
협조자
시행	방재시설부-15355	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)