문서번호	시설보수과-9966
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		오재영	12/02 김영철
협조
	주무관		송유진

『욱천복개2구간 정밀안전진단용역』

준공기한 연기 검토 보고

2021. 12.

서부도로사업소

시설보수과

『욱천복개2구간 정밀안전진단 용역』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 시행중인「욱천복개2구간 정밀안전점검 용역」과 관련하여 용역사의 준공기한 연기 요청에 따른 검토 보고임.

용역개요

○ 용 역 명 : 욱천복개2구간 정밀안전진단 용역

○ 용역기간 : 2021. 3. 31. ~ 2021. 12. 31.

○ 용 역 비 : 293,662천원

○ 용 역 사 : 주식회사 우빈기술공사 대표 조연우외 1

주요 추진경위

❍ 2021. 2.   2. : 용역 발주

❍ 2021. 3. 31. : 용역 계약

❍ 2021. 4. 26. : 착수

❍ 2021. 7. 30. : 중간 보고(서면)

❍ 2021.10.20.~11.10. : 자문회의

❍ 2021.11.24. : 건설기술심의 요청(기술심사담당관)

준공기한 연기 보고

○ 관련근거 : 과업기간 연장 요청의 건

☞ 우빈기 진단-21122호(‘21. 11. 30.)

○ 연기사유

- 신축이음 동절기 저온 측정 및 신축이음 조사분석 과업 추가 등 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기 요청함

○ 준공기한 연기

(당초) : 2021. 03. 31. ~ 2021. 12. 31.

(변경) : 2021. 03. 31. ~ 2022. 02. 28.

○ 귀책사유 : 욱천복개2구간의 신축이음 동절기 저온측정 및 신축이음 조사분석 과업 추가에 따른 과업기간 연장으로 발주처 귀책사유에 해당됨.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

○ 상기 보고 내용과 같이 욱천복개2구간의 신축이음 동절기 저온측정 및 신축이음 조사분석 과업기간 추가가 필요한 실정이므로 준공기한 연기 조치하고자 함.

향후계획

○ 2021. 11월 중 : 변경계약 체결(준공기한 연기)

○ 2022. 02월 중 : 용역준공

붙임 : 용역사 공문 1부.  끝.