문서번호	시설과-11079
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
이향연	이승우	강호광		12/02 구아미
협 조	시설관리팀장		임춘길
	시설팀장		홍석현

「대형제수밸브 점검정비 용역」

준공기한 연기 및 설계 변경 보고

2021.12.

상수도사업본부

(시설관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「대형제수밸브 점검정비 용역」

준공기한 연기 및 설계 변경 보고

‘대형 제수밸브 점검정비 용역’ 과업의 준공기한을 연기하고, 세부내역 변경사항을 반영하여 정산하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명: 대형 제수밸브 점검정비 용역

○ 용역기간: 2021. 4. 1 ～ 2021. 12. 10

○ 사 업 비: ********

○ 시행방법: 2개 용역으로 분리 발주(강북지역)

구 분	용 역 사	********	********
계		*******	*****
중부, 서부	(주)건양엔지니어링	*******	***
동부, 북부	(주)이준엔지니어랑	*******	***

※ 한강 이남, 이북 지역으로 구분하여 격년제로 용역 시행

○ 용역내용

- 버터플라이 밸브 기어박스 분해 및 윤활유, 노후 볼트 너트 교체

- 밸브 파손 상태, 녹발생 등 외관 조사, 작동여부 확인

□ 추진 경과

○ `11.04.07.	대형 제수밸브 유지관리계획 수립

○ `21.12.30.	용역 시행계획 수립

○ `21.04.01.	계약 체결

○ `21.04~05.	착수보고회(본부) 및 사업설명회(사업소) 개최

□ 준공기한 연기

○ 변경사항

구 분	용 역 기 간		비고
	당 초	변 경
(주)건양엔지니어링	`21.4.1.~12.10.	`21.4.1.~12.21.
(주)이준엔지니어랑	`21.4.1.~12.10.	`21.4.1.~12.21.

○ 연기사유 귀책소재: 서울특별시

○ 지체상금 부과여부: 미부과

○ 연기사유: 내실있는 과업추진을 위해 밸브상태 분석기간 등을 반영

□ 설계변경

○ 계약금액: 변동없음

○ 계약물량: 실제 시공에 따른 점검정비 물량 반영

구 분	********		***
	***	***
계	*****	*****	****
(주)건양엔지니어링	***	***	*****
(주)이준엔지니어랑	***	***	****

※ 상세내역은 붙임 설계변경 요약보고서 참조(붙임1)

○ 설계변경 심의위원회 구성

- 심의위원: 위원장(시설과장), 위원(한현숙, 홍석현, 강은영, 강정구)

- 간    사: 이향연

○ 설계변경 심의위원회 개최

- 일  시: 2021.12.3.

- 방  법: 코로나-19 확산방지를 위한 서면심의

□ 향후계획

○ `21.12.04.	용역 변경계약 (→본부 재무회계과)

○ `21.12.13.	용역 완료보고회

○ `21.12.21.	용역 준공처리

붙임:	1. 설계변경 요약보고서 각 1부.

2. 변경내역서 각 1부. 끝.