문서번호	녹지관리과-8730
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
김재희		곽영만	12/03 김상국
협조

「광진교 상부 녹지시설 정비공사」

실정사항에 따른 설계변경 보고

공  원  부

(녹지관리과)

「광진교 상부 녹지시설 정비공사」

실정사항에 따른 설계변경 보고

본 공사와 관련하여 다음과 같이 실정사항을 검토하고 설계변경하여 사업시행하고자 함.

1		공 사 현 황

가. 공 사 명 : 광진교 상부 녹지시설 정비공사

나. 총공사비 : *************

다. 공사기간 : 2021.10.14.~12.12.

라. 도 급 자 : ************

2		검 토 내 용

가. 현장 실정사항

구분	현황 및 문제점	검토 결과	비 고
식재공	설계된 무궁화의 시장 수급이 불가하여 수종 변경 ※ 설계자 검토의견서 첨부	- 무궁화 기존 12종 중 11종 계통 및 수종 변경 1.(배달계)한서 --> (단심계)대망 2.(배달계)배달 --> (단심계)화순 3.(단심계)고주몽 --> (단심계)고요로 4.(단심계)칠보 -> (단심계)래드보안재 5.(담심계)파랑새 --> (단심계)청암 6.(단심계)자명 --> (단심계)삼천리 7.(단심계)한얼단심 --> (단심계)단심 8.(단심계)홍단심 --> (단심계)영광 9.(단심계)해오름 --> (단심계)진이 10.(아사달계)아사달 --> (단심계)백단심 11.(아사달계)칠보아사달->(아사달계)화합	(간접비 포함)
		증 : 0원
	설계 이후 여름철 가뭄으로 인해 기존 관목 추가 고사 발생하여 수목 보식 필요	자산홍 물량추가 300 --> 600주 회양목 물량추가 200 --> 400주 - 눈주목 신규추가 0 --> 250주 조팝나무 신규추가 0 --> 200주 잔디(평떼)신규추가 0 --> 30m2
		증 : 8,900,000원
시설물공	목재데크 파손 물량 증가 목재데크 내구성 향상을 위해 오일스테인칠 도색 필요	- 목재데크교체 면적 변경 1m2 --> 15m2 바닥데크 오일스테인칠 추가 0m2 -->1674.2m2	(간접비 포함)
		증 : 11,252,970원
폐기물공	현장 고사목이 많아 제거 물량 증가로 인한 폐기물 물량 증가	- 폐기물공사 물량변경 1.761 ton --> 4.9ton	(간접비 포함)
		증 : 523,730원

3		개략공사비

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	***********	***********	**********
	부가세	**********	**********	*********
	도급비계	***********	***********	**********
총 공 사 비		***********	***********	**********

4		조 치 계 획

상기 검토 내용에 대하여 승인하고 설계 변경하여 사업 시행.

붙 임 : 1. 변경 내역서 1부.

2. 설계자 검토의견서 1부.  끝.