문서번호	치수과-7583
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김태규		최연호	12/03 박상보
협 조
	총무과장			정현석
	기획예산과장			代이경춘

- 염창나들목 리모델링공사(1차) -

준공기한 연기 검토 보고

2021. 12.

한강사업본부

치   수   과

- 염창나들목 리모델링공사(1차) -

준공기한 연기 검토 보고

하천점용허가 처리 지연에 따른 『염창나들목 리모델링 공사(1차)』 관련 준공기한 연기 사항에 대하여 검토 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 염창나들목 리모델링 공사

○ 공사기간 : (총차)2021. 9. 8. ~ 2022. 9. 7.

(1차)2021. 9. 8. ~ 2021.12.31.

○ 공사규모 : 차수벽 철거, 육갑문 및 E/V 설치, 나들목 내·외부 환경개선

○ 도 급 비 : (총차)1,815,725천원

(1차)  344,975천원

○ 도 급 자 : ㈜청미건설 대표 양국진

○ 공사감독대행 : 서울시설공단 공사감독1처

□ 추진경위

○ ‘21.  7. 5.     : 염창나들목 리모델링 공사 발주

○ ‘21.  9. 2.     : 염창나들목 리모델링 공사 계약

○ ‘21.  9. 5.     : 염창나들목 리모델링 공사 착공

○ ‘21.  9.~.11. : 실착공 전 하천점용허가 신청 협의

- ’21. 9.~11. 중 : 서울지방국토관리청 방문 협의 2회

○ ‘21. 12. 1.    : 하천점용허가 및 실시계획인가 신청(본부→국토청)

□ 준공기한 연기 검토

○ 연기사유 : 하천점용허가 처리절차 지연으로 인한 절대공기 부족으로 공사및 이에 따른 계측관리용역 준공기한 연장

- 서울지방국토관리청의 하천구역 내 공사에 대한 추가 검토 및 보완 사항 지속 요청 등 허가 절차 지연중

- 점용허가 지연으로 1차 공사 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연장 필요

○ 준공기한 연기 내역 (총차 변경없음)

구분	계약기간		비고
	당초	변경
염창나들목 리모델링 공사(1차)	2021.09.08. ~2021.12.31.	2021.09.08. ~2022.04.30.	4개월 연장
염창나들목 리모델링공사 계측관리용역(1차)	2021.09.03. ~2021.12.31.	2021.09.03. ~2022.04.30.	4개월 연장

○ 지체상금 : 미부과

○ 귀책사유 : 한강사업본부

□ 조치계획

○ 염창나들목 리모델링 공사관련 준공기한 연기 의뢰(치수과 → 총무과)

○ 하천점용허가 즉시 실착공 가능토록 공정 계획 수립 철저.  끝.