“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(통보)(아리수나라 옥상녹화 정비사업)

1. 정수시설과-6640(2021.12.02. 설계변경계약 의뢰) 호와 관련입니다.

2. 「아리수나라 옥상녹화 정비사업」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약 체결되었음을 보고(통보) 합니다.

가. 계 약 명 : 아리수나라 옥상녹화 정비사업

*******************************

다. 변경계약일자 : 2021. 12. 03.

라. 변경내역(계약금액)

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 ․ 감액(원)
도급비	133,167,800	120,626,000	△12,541,800

마. 변경사유 : 보험료 및 산업안전보건관리비 등 실비정산에 따른 금액변경

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김효영		행정관리과장	박진기		뚝도아리수정수센터소장	12/03 代박진기
협조자
시행	행정관리과-11947	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	/
전화	3146-5512	/전송	3146-5508	/	khy5912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)